코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰 [디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역]

1. 정보공개정책과-29197(2022. 7. 21.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인「디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역」과 관련, 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역

나. 계약업체 : ******

다. 계약금액 : **********************

라. 변경내용 : 준공기한 연기

구분	당초	변경	비고
준공일	2022년 8월 31일	2022년 9월 30일	용역비 변동 없음

마. 변경사유 : *******************************************************************************

붙임  1. 용역 계약기간 연장 계획 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	정보공개정책과장
주무관	최지현		기록관리팀장	김성민		정보공개정책과장	07/22
김숙희
협조자
시행	정보공개정책과-29235	(	2022.07.22	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가) 서울시청 7층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5695	/전송	02-2133-0769	/	20160125471@seoul.go.kr	/	부분공개(4)