국회의원 요구 자료 제출

시 행	주차계획과-24917
결재일자	2022.08.04
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 교통정책과장

주무관		환승시설팀장	주차계획과장	교통기획관	도시교통실장	결재
이상욱		이유국	김형규	이상훈	08/04
					代이상훈
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1162번,안규백 의원,국방위원회)

따로붙임 : 안규백 국회의원 요구자료 1부.  끝.

안규백 의원(국방위원회,더불어민주당)

□ 요구번호 : 1162

□ 요구내용

1. 청량리역 광역환승센터 사업 추진현황

- 사업개요, 추진경과, 향후계획, 현안사항, 담당자 연락처, 관련연구

용역 자료 제출

□ 의원님께서 요청하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

[ 청량리역 광역환승센터 사업 추진현황 ]

□ 사업개요

○ 사업구간 : 서울시 동대문구 청량리역 일원

○ 사업규모 : 지하버스환승센터, 통합대합실 및 편의시설 등(21,664㎡)

○ 추진방식 : 환승센터 / 재정사업

○ 사업기간 : '21 ∼ '28

○ 총사업비 : 1,699억원(국비 30%, 지방비 70%)

○ 국가계획 : 제4차 대도시권 광역교통시행계획 반영(’21.7)

제3차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획 반영(’21.8)

○ 사업내용(안)

-********************************

-*******************************

※ 본 사업내용은 기본구상안(`21년) 기준으로 향후 타당성 평가 및 개발계획 수립 시

변경될 수 있음

□ 추진 경위

○'20. 4. 9. : 청량리역 공간구조 개선 및 환승센터 기본구상 공동용역 착수

※ 대광위, 서울시, 철도공사, 철도공단 4개 기관 공동 추진

○'20.10.26. : 청량리역 종합구상(안)(수평환승‧지하버스환승센터 등)

○'21. 4. 4. : 청량리역 공간구조 개선 및 환승센터 기본구상 용역 완료

○'22. 3. : 환승센터 조성 국고보조금 상향(30%→50%) 관련 대광위 협의 및 건의

○'22. 7~8. : 청량리역 환승센터 타당성 평가 및 기본계획 수립용역 입찰공고 중

□ 향후 계획(안)

○'22. 하반기 : 청량리역 광역환승센처 타당성 평가 및 개발(기본)계획 용역 착수

○'23. ~ `24. : 타당성 및 기본계획 용역 시행

○'25. ~ `28. : 공사 및 사업완료(예정)

따로붙임 : 청량리역 광역환승센터 기본구상(안). 끝.

작성자	기 관 명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (주차계획과)	담당사무관	이유국
	☎ 2133-2364	주무관	이상욱
	작 성 일 : 2022. 08. .

[ 따로붙임 ]

□ 연계 청량리역 광역환승센터 구상(안)

< 환승센터 기본 구상(안) >

< 통합대합실 >	< 지하버스환승센터 >