문서번호	문화정책과-27700
결재일자	2022. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	종무팀장	문화정책과장
이인식	代이인식	08/31
		전재명

전통사찰 자연재난 피해 복구 지원계획

전통사찰 자연재난 피해 복구 지원계획

2022. 8.

문화정책과

전통사찰 자연재난 피해 복구 지원계획

’22. 8. 8. 집중호우로 인해 전통사찰********에 재난피해가 발생하여 응급 복구 및 2차 붕괴를 사전에 방지하여 재난피해 복구를 지원하고자 함

Ⅰ		사업개요

□  추진근거

ㅇ 전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제3조의 2

ㅇ 서울특별시 재난관리기금 설치 및 운용조례 제5조 제2항

※ 전통사찰*****호우피해 복구계획(도봉구 문화관광과-23044)

□  사업개요

ㅇ 사업기간 : ’22. 9월~ 12월

ㅇ 사업대상 : *******

ㅇ 사업내용 : 축대하부 토사 유실 응급복구

ㅇ 소요예산 :　18,000천원 ※ 서울시 재난관리기금 신청 후, 심의를 통해 선정

(단위 : 원)

공 종 명	단 위	수 량	단 가(원)	금 액(원)	비 고
1. 직접공사비				13,860,000
비탈면 고르기	M2	180	20,000	3,600,000
식생네트 시공	M2	180	25,000	4,500,000
방수천막 시공	M2	180	18,000	3,240,000
현장정리	M2	180	14,000	2,520,000
2. 간접공사비				2,503,636
일반관리비	식	1		831,600
이윤	식	1		1,256,614
산재보험료	식	1		326,340
고용보험료	식	1		89,082
3. 부가가치세				1,636,364
총 계				18,000,000

ㅇ 사업시급성 : 2차 붕괴 위험해소 및 안전확보 필요

Ⅱ		재난피해 개요

□  전통사찰 피해현황

ㅇ 사찰현황

- **************************************

ㅇ ******************************

ㅇ 피해내용 : 스님 숙소 및 공양간 일부누수, 축대 하부 토사 유실

※’ 22. 8. 8.(월) 일강수량 129.6mm, / 8. 9.(화) 일강수량 123.1mm

ㅇ 현장확인(자치구 담당자)

- 1차방문(’22. 8. 10.) : 스님숙소 누수진행 확인, 축대하부 토사유실

- 2차방문(’22. 8. 17.) : 추가피해 없음, 보수업체 견적확인

Ⅲ		복구계획 및 사업검토

□  복구계획

ㅇ 현재 **** 호우로 인한 추가피해는 발생하지 않았으나, 축대 하부의 토사가 계속 유실될 경우 축대까지 영향을 끼칠 수 있어 축대 복구를
우선 진행하고자 함

ㅇ ****축대 복구는 응급보수를 시행, 이후 보수정비는 23년 전통
사찰 보수정비사업을 신청 지원검토 예정

****************************

*******************************************************************************

*****************************************

Ⅳ		추진일정

□ 추진절차

일 자	추진내용	비 고
’22. 8월	사업방침 수립	자치구 담당부서
’22. 8월	재난관리기금 검토요청	자치구 → 문화정책과
’22. 8. 31.	재난관리기금 심의요청	문화정책과 → 안전총괄과
’22. 9월	심의결과 통보 및 예산 재배정	자치구 담당부서
’22. 9월	사업발주 및 응급복구 시행	자치구 → 안전총괄과
’22. 9월	자금 배정 요청	안전총괄과 → 자치구
’22. 9월	자금 배정 승인	재무과
’22. 10월	지출	자치구
’22. 11월~12월	준공 및 정산	자치구

붙임  1. 서울시 재난관리기금 신청(자치구 공문) 1부.

*********************

************

*****************************ㅇㅇㅇ