아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 설계변경(전체9회, 7차2회) 계약 의뢰

우리 부에서 시행 중인「올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」에 대해서 아래와 같이 설계변경(전체9회, 7차2회) 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 용역기간 : '16.4.22.~'22.12.31. (7차 : '22.1.1.~ '22.12.31.)

3. 도 급 비 : 4,896,700천원 (7차 : 886,300천원)

4. 도 급 자 : ㈜이산 외 2개사

5. 변경내역                                                                 (단위 : 원)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

6. 변경사유

- 시설공사 준공검사, 자재검수 등에 따른 기간연장

7. 예산과목

- 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단), 시설비 및 부대비, 감리비

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 내역서(전체9회, 7차2회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토 목 부 장
주무관	이승주		터널건설과장	한병찬		토목부장	12/29
하현석
협조자	주무관	도제경
시행	토목부-37695	(	2022. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층, (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/	dltmdwn@seoul.go.kr	/	부분공개(5)