아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(2022년 테헤란로 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인「2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사」의 준공기한이 연기됨에 따라 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사

나. 공사개요: *******************************

다. 계 약 자: ***************

라. 계약기간

1) 당  초: 2022. 06. 28. ~ 2023. 01. 23.

2) 변  경: 2022. 06. 28. ~ 2023. 06. 30.

마. 연기사유: ***************************

바. 귀책사유: ************

사. 지체상금 부과 여부: ***

아. 하자기간: 준공검사일로부터 3년

붙  임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 검토 보고서(공사감독처) 1부.

4. 실정보고서(시공사) 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	신중선		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	12/29
代이승우
협조자
시행	급수운영과-36212	(	2022. 12. 29.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	부분공개(5)