문서번호	외국인다문화담당관-12905
결재일자	2017.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	외국인정책팀장	외국인다문화담당관
신재민	김경원	11/06 고경희

서울 디딤플라자 건립 관련 TF회의 개최

2017.  11.

여성가족정책실

(외국인다문화담당관)

서울 디딤플라자 건립관련 TF회의 개최

서울 디딤플라자 건립과 관련하여 기본계획 수립 이전에 효율적인 시설 내부 구성을 위한 현장 및 전문가의 의견을 수렴코자 TF회의를 개최하고자 함

Ⅰ		회 의 개 요

❍ 일    시 : ’17. 11. 9(목) 14:00~15:00

❍ 장    소 : 서울 글로벌센터빌딩 4층

❍ 참 석 자 : 8명

- 내부(5) : 외국인정책팀장, 외국인주민인권팀장, 글로벌센터운영팀장, 공공개발센터 팀장, 사업 담당자

- 외부(3) : 여성가족재단 연구원, 서울글로벌센터 생활지원팀장,

서남권 글로벌센터장,

❍ 주요안건 : 서울 디딤플라자 시설 구성(안) 관련 세부 논의

Ⅱ		사 업 개 요

□ 건립 개요

❍ 위    치 : 영등포구 대림3동 711번지 일대(대림역 7호선 연접)

❍ 면    적 : 7,969.4㎡ (건축규모 : 2,220㎡)

❍ 사업방식 : 위탁개발사업

❍ 총사업비 : 약 760억원

❍ 주요시설 : 디딤오피스지원센터, 디딤커뮤니티, 디딤학사, 임대오피스, 근린상가

□ 서울 디딤플라자 시설 구성(안)

구 분	전용면적 (층수)	시설구성
디딤스퀘어	4,800㎡ (지하 1~지상 1층)	◾ 전층 근린생활시설 ◾ 외부 썬큰 광장
디딤 커뮤니티센터	2,350㎡ (지하 1~지상 3층)	◾ 지하1층: 수영장 ◾ 지상1층: 사무실, 치안센터 ◾ 지상2층: 다목적실(2개실), 공연장 ◾ 지상3층: 건강교실, 문화교실, 공연장상부
디딤 오피스지원센터	2,125㎡ (지상 2~4층)	◾ 지상2층: 원스톱종합상담센터, 출입국관리사무소 등 ◾ 지상3층: 교육장(한국어, 외국인주민역량강화, 취업교육, 창업대학, 무역아카데미 등) ◾ 지상4층: 인큐베이션오피스, 다목적실, 세미나실 등
디딤오피스	5,250㎡ (지상 5~14층)	◾ 전층 업무시설
디딤학사	6,300㎡ (지상 4~15층)	◾ 4층: 장애인실, 세탁실, 피트니스센터, 푸드코트 등 ◾ 5-15층: 96실(1,2,4,6,8인실), 560명 수용

Ⅲ		향 후 일 정

❍ 서울 디딤플라자 건립 추진계획 수립(외국인다문화담당관)	’17.10월
❍ 서울 디딤플라자 수탁사 선정 및 기본계획 수립(공공개발센터)	’17.11~’18.2월
❍ 지방재정법에 따른 타당성조사(공공개발센터)	’18.4~11월
❍ 시・중앙투자심사(외국인다문화담당관)	’18.하반기
❍ 주민공청회 등 시민 의견수렴(외국인다문화담당관)	’18.하반기
❍ 공유재산심의 및 관리계획 의결(외국인다문화담당관)	’19.상반기
❍ 기본 및 실시설계(수탁사)	’19.3~12월
❍ 건립공사 착공(수탁사)	’20.상반기
❍ 서울 디딤플라자 준공 및 개관(외국인다문화담당관)	’22.하반기

Ⅳ		소 요 예 산

❍ 회의참석 수당 및 운영비 지급 : 350천원

- 참석수당 : 100천원 × 3명 = 300천원

- 다과비 등 : 50천원

❍ 예산과목

- 글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성, 외국인 생활 지원강화, 중국동포 사회통합 지원, 일반운영비, 사무관리비