문서번호	도시철도계획부-10424
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계획과장		도시철도계획부장		도시철도국장		시설국장
조세호	김동철		정대현		김진팔		대결 12/21 김홍길
협 조

- 서부선 도시철도 민간투자사업 -

제3자 제안공고 추진 계획

2020. 12.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 서부선 도시철도 민간투자사업 -

제3자 제안공고 추진계획

서부선 도시철도 민간투자사업 제3자 제안공고 관련 사업제안 및 사업시행조건, 제안서 작성 및 평가기준 등 주요내용 보고임.

Ⅰ		사업개요

새절역

여의도

서울대입구역

○ 위    치 : 새절역(6호선)~여의도~서울대입구역(2호선)

○ 규    모 : 연장 16.2㎞, 정거장 16개소,
차량기지 1개소

○ 사업기간 : 2020년~2028년

○ 사업방식 : BTO-rs(위험분담형)

○ 총사업비 : 1조 5,203억원(2016. 1. 불변가격, 보상비 제외)

최초제안 주요내용

***********************************

*******

**************************

*****************************************

*********************************************

*********************

*******

************************

*****************************

*********************************

*********

*******************************

********************************************

Ⅱ		추진경위

○ ’15.06.30. : 도시철도망구축계획 변경 승인(국토부)

- 서부선 노선 연장 : 새절역~장승배기역→서울대입구역

○ ’17.02.10. : 제안서 접수(두산건설)

○ ’17.02.15. : 제안서 검토의뢰(시→서울공공투자관리센터)

○ ’17.03.31. : 민자적격성조사 의뢰(시→PIMAC)

○ ’20.06.19. : 민자적격성 조사 완료(PIMAC)

*******************************************************************

***********************************************************

○ ’20.07.09. : 업무이관(도시교통실→도시기반시설본부)

○ ’20.07.28. : 제3자 제안공고(안) 관련 전문가 자문회의(1차)

○ ’20.08.05. : 제3자 제안공고(안) 관련 전문가 자문회의(2차)

○ ’20.08.14. : 기획재정부/공공투자관리센터 사전 협의

○ ’20.08.26. : 제3자 제안공고(안) 검토 요청(PIMAC, S-PIMs, 법률지원담당관)

○ ’20.09.24. : 도시철도기본계획 수립 생략 요청(본부→국토부 대광위)

○ ’20.09.25. : 제3자 제안공고(안) 검토 회신(법률지원담당관)

○ ’20.10.14. : 제3자 제안공고(안) 검토 회신(PIMAC)

○ ’20.10.16. : 제3자 제안공고(안) 검토 회신(S-PIMs)

○ ’20.10.17. : 제3자 제안공고(안) 전문기관 검토의견 관련 전문가 자문회의

○ ’20.10.28. : 시 재정계획심의(원안가결)

○ ’20.11.04. : 기재부/PIMAC 민간투자사업심의 조기 개최 관련 방문협의

○ ’20.12.16. : 민간투자사업심의위원회(원안의결), 시의회 동의

Ⅲ		제3자 제안공고 주요내용

**************************

***************************

********

*******************************************

********************************************************************************

*****************************

*************

**********************************************************************

*********************************

**************************************

*******************

************************************************************************

*****************

**************************************************

****************************************************************************

********************************************************

*************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************

**************************

********************************************************************************************

********************************************

***************************************************************************

********************************************************

**************

******************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************

*****************************

******************************************************

*****************************************************************************

***************************************

******************************

**********************************************

**********************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************

*********************************************************

****************

********************

*********************************

*********************

********************************************************************

***********************

************************

********************

*****************************

************************

*********************************************************************************

***************

*******************************************************************

****************************************************************************************

*******************************

**************

**************************************

*******************

*****************************************************************************************************************

*************

*****************************************

*********

**********************************

**************************************************************************

******************************

*********************************************

Ⅳ		향후계획

*****************************************************

************************************

************************

*****************************

붙임 1. 제3자 제안공고문 1부.

2. 제3자 제안공고 전문 1부.  끝.