문서번호	기전과-54
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		박요셉	01/02
			김은덕
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「위례신도시 택지개발사업 전기공사(위례 2단계 및 4단계 교통신호)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「위례신도시 택지개발사업 전기공사

(위례 2단계 및 4단계 교통신호)」

2023. 1. 2.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

위례신도시 택지개발사업 전기공사(위례 2단계 및 4단계 교통신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 교통신호기 원인자 부담공사 준공기한 연기 요청[위례신도시 및 북측도로]

ㅇ **************************************

□ 교통신호기 원인자부담공사 변경승인(공기연장) 통보 「위례신도시 택지개발사업 4공구 전기공사(신호)」 「위례택지개발지구 내 송파IC 교통안전시설 원인자부담공사」

ㅇ 동부도로사업소 기전과-10678호(2021.09.23.) 및 10677호(2021.09.23.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 위례신도시 택지개발사업 전기공사        (위례 2단계 및 4단계 교통신호)

□ 공사위치 : 송파구 위례신도시 제4공구 및 제2공구

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	******************** ********	******** *****	*******

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************	2단계
	*****************	*****************	4단계
시 공 사	*******	*******	2·4단계

□ 변경사유

o 교통신호기 인계인수 협의 등에 따른 준공기한 연기(위례 2단계)

o 택지개발사업 단계별 사업준공일 변경에 따른 준공기한 연기(위례 4단계)

o 대표자 및 상호변경으로 인한 시공사 변경(위례 2·4단계)

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.  끝.