아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	교량 공사전 안전조치 요청 건에 대한 의견 조회-청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

1. 도로시설처-21200호(2022.12. 7)와 관련입니다.

2. 우리본부 건설공사인「청계천~정릉천 자전거도로 연결공사」의 신설 자전거도로 연결교량의 교대 2(직접기초) 및 가시설 설치 위치가 내부순환도로 정릉천고가교 교각 P5 확대기초(말뚝기초)와 근접하여 시공함에 따라 굴착 시 교각 안정성 확보를 귀 공단에서 요청하였으며,

3. 이와 관련하여 2022.12.26. 책임건설사업관리기술인이 귀 공단에 방문하여 설명드린 바와 같이 10.9m 수평 이동하여 변경시공하고자 하오니 2023. 1.10일한 검토의견을 회신하여 주시기 바라며 수방기간 도래 전 공사완료를 위해 기한 내 의견이 없을 경우 변경(안)대로 추진하고자 함을 알려드립니다.

붙임 1. 교대 변경(안) 평면도 1부.

2. 원설계사 및 기술지원기술인 검토 의견 각 1부.(별도). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조동협		도시고속도로과장	김동현		토목부장	01/02
이임섭
협조자	주무관	노승환
시행	토목부-102	(	2023. 1. 2.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2543	/전송	02-3708-2599	/	yerom@seoul.go.kr	/	대시민공개