문서번호	기획관리과-86
결재일자	2023. 1. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
이래운		김진기	01/03
			추경수
협조
	주무관		윤별

2023년도 기전시설물 유지관리 계획

2023. 1.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

2023년도 기전시설물 유지관리 계획

2023년도 우리 센터 기전시설물 유지관리 계획을 수립·시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진목적

□ 기반시설 정비 및 예방활동으로 무중단 정보서비스 제공

□ 노후 시설물의 연차적 개선을 통한 설비 안정성 확보

□ 기반시설의 주기적인 점검 및 유지관리를 통한 정전, 화재 등 안전사고 예방

□ 연동시험, 소방훈련 등 장애대응 훈련을 통한 신속한 대응체계 구축

Ⅱ		시설현황

□ 청사현황

○ 규    모: 1개동(지하1층, 지상4층), 연면적 9,090㎡(대지 7,603㎡)

○ 준    공: 1994.10.19.

○ 주요시설

2층		3층	지하1층
관제실	통신실·시스템실	시스템실	기계실	전기실	발전실
179㎡	143㎡	1,218㎡	377㎡	456㎡	123㎡

※ 1층(전산교육장 6개 등), 4층(사무실, 회의실, 강당 등), 지하(체력단련실 등)

□ 주요 기전시설 현황

구 분	규 격	수 량	구 분	규 격	수 량
****	***	***	*****	*******	***
	***	***	******	********	***
***	*******	**	******	**********	***
	*******	**	***	*************	**
*****	*****	**	****	*********	***
***	******	**	****	*********	***
***	*****	**	****	*******	*** ******

Ⅲ		2023년 주요 추진계획

□ 시설개선 분야

○ 노후 UPS 교체

- 사업기간: '23. 2. ~ '23. 11.

- 사업예산: ********

- 사업규모: ****************

- 추진일정

·'23. 2~3월 : 공사 설계(내역서, 시방서, 도면 작성 등)

·'23. 4~6월 : 계약 사전절차 이행

·'23. 7월    : 공사 발주

·'23. 11월   : 공사 준공

○ 노후 항온항습기 교체

- 사업기간: '23. 3. ~ '23. 9.

- 사업예산: ******

- 사업규모: *****************

- 추진일정

·'23. 3월  : 공사 발주

·'23. 9월  : 공사 준공

○ 청사 구조안전진단 용역 추진

- 사업기간: '23. 2. ~ '23. 7.

- 사업예산: ******

- 사업내용: ********************************

- 추진일정

·'23. 2~3월 : 기술용역타당성 심사

·'23. 4월    : 용역 발주

·'23. 7월    : 용역 준공

- 향후계획: *********************

○ 노후 소방설비 교체

- 사업기간: '23. 3. ~ '23. 9.

- 사업예산: *****

※ *********************

- 사업규모: ************************************

·'23. 3월   : 공사 발주

·'23. 9월   : 공사 준공

□ 유지관리 분야

○ 시설물 유지관리 용역 추진

- 용역대상: 전기시설, 항온항습기, 승강기, 소방시설, 건축물 등

**************************

- 사업기간: '23. 1. ~ '23. 12.(1년)

- 사업예산: ******

- 사업내용: 분야별 정기점검 실시 및 안전관리 대행 등

○ 시설물 유지관리 및 법정검사 실시

- 시설물 자체 정기점검 및 정비(수리 및 소모품 구매 등) 실시

·사업기간: '23. 1. ~ '23. 12.(1년)

·점검주기: 일별, 월별, 분기별, 계절별(해빙기, 우기, 동절기 등)

·사업예산: ******

- 계절별(여름철 수방, 겨울철 제설 등) 청사 대책 수립

- 안전점검의 날 추진: 매월 4일

- 공공요금(전기요금) 납부(매월)

·사업예산: ********

·예산과목: 데이터센터 청사시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

- 각종 법정검사 실시

[청사분야]

·소방시설 점검(작동기능점검, 종합정밀점검): 연 2회

·청사 소독 : 연 6회

·저수조 청소(먹는물 수질검사 포함): 연 2회

·정화조 청소: 연 1회

[시설분야]

·승강기 정기검사: 연 1회

·하자검사 실시(LED 램프구매외 4건): 연 2회

(하자검사 대상: 하자담보 책임기간 내 공사 및 물품)

○ 장애 대응 모의훈련 실시

- 전기시설 연동시험 실시

·목적: 전기시설(UPS, 비상발전기 등) 이상유무 확인

·주기: 분기 1회

- 소방 훈련 실시

·목적: 화재예방 및 화재 시 신속한 대응체계 구축

·대상: 센터 전직원 및 상주 외부인력 등

·주기: 반기 1회(상반기: 소방서 합동훈련, 하반기: 자체 훈련)

☞ 소방훈련 시 중대산업재해 예방훈련(질식, 추락사고 등)과 연계 실시.  끝.