문서번호	설비부-116
결재일자	2023. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장 직무대리
박근형		문학준	01/04
			신용휴
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

설비분야 준공(납품)기한 연장 검토보고

2023. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』

설비분야 준공(납품)기한 연장 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사』설비분야(전기,통신) 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장에 대하여 보고 드림.

1		사업개요

○ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사(전기,통신)

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

○ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	*****	**	***********************	*************
		**	***********************	*************
****	******	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

○ *********************************

2		관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 (제8절 2.공사 계약기간의 연장)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 (제7절 2.물품 계약기간의 연장)

○ 제2자유로 종점부 입체화 공사 사업기간 조정 검토 보고

[토목부-36497 ('22.12.15.)]

○ 설비분야(전기,통신) 준공(납품)기한 연장요청에 대한 검토 보고

[제2자유입건 제2023-001호 ('23.01.03.)]

3		검토내용

○ 변경내용

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	준공(납품)기한
					당초	변경(연장)
**************	****	*****	**	*************	***********	***********
			**	*************	***********	***********
**************	****	******	**	***********	***********	***********
			**	***********	***********	***********
**************	**************	*********	**	*********	***********	***********
***********	****	****	**	***********	***********	***********
***********	******	*******	**	***********	***********	***********
*************** ******************	********	*******	**	**********	***********	***********
*************** ******************	********	*******	**	**********	***********	***********
*************** ******************	***** ****	*******	**	*********	***********	***********
*************** ******************	******	*******	**	**********	***********	***********
*************** ******************		*******	**	*********	***********	***********
*************** ******************	******	****	**	**********	***********	***********
*************** ******************	******	*******	**	*********	***********	***********
*************** ******************	**** ****	*******	**	**********	***********	***********

○ 변경사유

- 선행공종(토목) 준공기한이 연장(2022.12.30. → 2023.03.31.)됨에 따라 후속공종인 전기,통신공사 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연장이 필요함.

○ 건설사업관리인 검토의견

- 선행공종(토목) 준공기한 연장에 따른 후속공종(전기,통신) 준공(납품)기한 연장이 적정하다고 사료됨.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변동없음

4		보고자의견

○ 건설사업관리단의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 설비분야(전기,통신) 공사 및 관급자재의 준공(납품)기한 연장을 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰 하고자 함.

붙임  1. 사업기간 조정 검토 보고(토목부) 1부.

2. 건설사업관리단 문서 1부.  끝.