문서번호	설비부-104
결재일자	2023. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장 직무대리
최환수		배수웅	01/04
			신용휴
협 조

『국회대로 도로다이어트구간 전기공사』 발주금액(도급) 변경보고

2023. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『국회대로 도로다이어트구간 전기공사』

발주금액(도급) 변경 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『국회대로 도로다이어트구간 전기공사』관련, '23년 노임단가가 변경됨에 따라 이를 반영하여 공사 발주하고자 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 국회대로 도로다이어트구간 전기공사

□ 위    치 : 목동운동장 ~ 여의2교 사거리

□ 공사규모 : 차로조정 (8차로⇒6차로), L=3.6km

□ 공사내용 : 가로등주 168본, 신호지주 55본, 기타 배관,배선 설치 등

□ 소요예산 : 2,757백만원(도급 1,800, 관급 736, 이전 221)

□ 공사기간 : 착공일부터 ~ 2024. 6. 30.

2		추진경과

□ '20.  3.  : 기본설계 수행

□ '22.  9.  : 좋은빛 심의 완료

□ '22. 11.  : 기본 및 실시설계 완료

□ '22. 11.  : 계약심사 완료

□ '22. 12.  : 토목공사 계약 및 착공

□ '22. 12.  : 전기공사 발주계획 방침

□ '22. 12.  : 전기공사 일상감사 완료

3		발주금액 변경

□ 금액 변경 사유 : '23년 노임단가가 발표('23.1.1.) 됨에 따라 이를

반영한 금액으로 발주

□ 공사금액 변경 현황                                      [단위 : 원]

구분	기 존	변 경	증감
계	2,757,345,000	2,800,918,000	증 43,573,000
도급비	1,799,708,000	1,843,281,000	증 43,573,000
관급비	736,529,000	736,529,000	-
이전비	221,108,000	221,108,000	-

※ 도급액을 제외한 관급자재 및 이전비는 동일

※ 입찰참가 자격 및 제한사항 변동없음(시공능력평가액 제한)

4		향후계획

□ '23. 1. : 전기공사 계약의뢰 (변경된 금액 반영)

※ 노임단가 변경에 따른 금액변동은 계약심사 제외 대상

붙임  전기공사 발주계획서 1부.  끝.