문서번호	인터넷통신과-233
결재일자	2023. 1. 5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		인터넷통신과장	데이터센터소장
신은실		도찬구	01/05
			추경수
협 조
	기획관리과장			김진기
	클라우드센터운영과장			하동수
	주무관			최재욱
	주무관			조성준

서초 ↔ 상암 센터 간 전용통신망 구축계획

2023. 1.

서울시데이터센터

(인터넷통신과)

서초 ↔ 상암 센터 간 전용통신망 구축계획

데이터센터(서초, 상암)간 재해복구시스템(DR)의 신속한 운영체계 구축과 이원화한 클라우드 정보서비스 전환 확대를 위한 전용 정보통신망을 구축하고자 함.

□ 추진 근거

ㅇ 데이터센터 재난대응 종합계획 수립(기획관리과-27955호, '22.11.29.)

□ 정보통신망 구축 방안

ㅇ 추진방법: 기간통신사업자(KT, SKB 등) 전용회선 임대('23년~'24년)

⇒  자가망 구축('24년)

ㅇ 기간통신사업자 전용회선 임대 계획

- 프론트오피스 SDDC 전용 통신망: '23. 2월 개통

- 백오피스 SDDC 전용 통신망: 2023년 SDDC 구축 사업 일정에 따라 개통

ㅇ 프론트오피스 전용회선 대역폭 및 회선수: **********

- SDDC 기반 클라우드 환경에서 서초 ↔ 상암간(거리 51km) 데이터 유실 없이, A-A 이중화 시스템 구현이 가능한 전용회선 대역폭으로 산정

※ 대역폭 산정 상세내역은 전용회선 대역폭 검토 보고(붙임 1) 참조

ㅇ 기간통신사업자 선정방법: 업체의 제안요금 및 조건을 비교 검토 후 선정

(부가세 포함)

구 분	**	*******	****
제안금액	**********	***********	************** ****************
설 치 비	**********	**

※ 약정기간은 서초 ↔ 상암 간 자가망 구축을 고려하여 2년으로 함.

□ 회선 계약

ㅇ 업체명: **

ㅇ 약정기간: '23. 2. ~ '25. 2.(2년)

ㅇ 이용요금: ********************

※ ************************************************************************************

ㅇ 선정사유

- 견적을 제시한 2개 업체*****************중 비용이 저렴하며,

- 우리 센터 전용회선도 다수 관리하여 원활한 통신 서비스 제공 가능함.

ㅇ 예산과목: 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 시스템 유지관리, 정보통신시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후 일정

ㅇ 회선 계약 요청	: '23. 1. 5.

ㅇ 장비설정 및 회선연결	: '23. 1. 5. ~ 2. 9.

※ 회선 개통 예정일	: '23. 2. 9.

ㅇ ************************************: '23. 2.10. ~

붙임 1. 전용회선 대역폭 검토 보고 1부.

2. 견적서********* 각 1부.

3. ************ 1부.  끝.