문서번호	미래첨단교통과-258
결재일자	2023. 1. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		자율주행팀장	미래첨단교통과장
김진구		최종선	01/05
			이수진
협조

『심야 자율주행버스 도입』 관련

교통현황 기초자료 조사 시행 계획

2023. 1

미래첨단교통과

『심야 자율주행버스 도입』 관련

교통현황 기초자료 조사 시행 계획

심야 자율버스 운행과 관련하여 최적의 노선 선정 등을 위한 기초자료 조사 용역을 추진하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

○ 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 제7조

○ 자율주행자동차 시범운행지구 운영 및 지원 조례

○ 자율주행자동차 기반 구축 계획(시장방침 제89호, '21.12월)

－ '23년 심야 자율주행버스 도입(중앙버스전용차로 운행 1개 노선 실증)

□ 추진목적

○ 심야 자율주행버스 도입 관련 최적 노선 선정

－ 기존 운영중인 심야버스 운영현황 관련 교통현황 실태 조사

－ 심야 자율주행버스 운행 여건 조사 등

○ 자율주행 시범운행지구 운영계획서 작성을 위한 위한 기초자료 수집

－ 심야 자율주행버스 대상 노선 교통/도로여건 현황 자료 수집 및 조사

－ 심야 자율주행버스 무상/유상운송 실증 관련 업체 수요 조사 등

Ⅱ		추진계획

□ 용역 시행 계획

○ 용 역 명 : 심야 자율주행버스 운행 관련 기초자료 수집 및 조사 용역

○ 과업기간 : 계약일로부터 6개월

○ 소요예산 : 19,110천원(부가세 포함)

□ 과업의 범위 : 중앙버스전용차로 운행 도로

○ 양화신촌로, 망우왕산로(종로포함), 통일의주로, 강남대로 등 4개 노선

□ 주요 과업내용

○ 심야 자율주행버스 최적 노선 선정 관련 기초자료 수집

- 기존 운행중인 심야버스 운영현황(이용자 등) 관련 기초자료 수집

- 심야시간대 중앙버스전용차로 운행대수 및 운영여건 관련 기초자료 수집

- 기술발전지원금 지급 관련 기초자료 수집

○ 자율차 시범운행지구 운행계획서 작성 관련 조사

- 도로 및 교통현황 조사

- 자율주행서비스 실증 모델 조사

○ 심야 자율주행버스 유상운송 등 서비스 운영 관련 자율차 업체의 의견 수렴 및 경쟁력 조사

－ 심야 자율주행버스 운송 서비스 참여 기업 의견 조사

－ 심야 자율주행버스와 기존 심야버스와의 경쟁력 조사

○ 자율차 시범운행지구 운영계획서 작성 지원

－ 국토부에 제출하는 시범운행지구 계획서 작성 지원 등

Ⅳ		조치계획 및 향후일정

□ 조치계획

○ 용역 시행을 위한 수의계약 체결

- 근  거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행안부 예규) 1인견적에 의한 수의계약

- 사  유 : *******은 그간 자율주행 관련 용역 수행 경험이 많고, 신뢰성 있는 기초자료 수집 및 조사를 위해서는 시 산하기관인 *******과의 수의계약시행이 필요함

- 금  액 : 19,110천원(부가세 포함)

- 업  체 : *******

○ 소요예산 조치 : 19,110천원(부가세 포함)

- '23년 자율주행자동차 시범운행지구 조성 및 운영 사무관리비 활용

□ 향후일정

○ 계약 의뢰(⇒재무과)                             : '23.01.05.~

붙 임 : 1) 과업내용서 1부.

2) 산출내역서 1부. 끝.