문서번호	도시철도건축부-171
결재일자	2023. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
김영준		박영동	01/09
			임우진
협조
	주무관		채종철

「별내선(8호선연장)1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

2023. 01.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

별내선(8호선연장) 1공구 승강장 스크린도어 상부벽체 및 기능실 벽체마감 면처리 변경 대한 실정보고임.

□ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 [행정안전부]

(제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사 설계의 변경)

○ 설계변경 실정보고 승인 요청

[건설사업관리단, 별내 감1-23-15(2023.1.5.)호]

□ 실정보고 내용

○ ********************************

- ****************************

○ *********************************** ***********************************

- *******************

□ 실정보고 내용 검토

○ 관련법규

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이

있을 경우 설계변경 가능

※ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사설계의 변경

1. 설계변경

가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

4) 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

○ 건설사업관리단 검토 의견

① *********************************

*********************

- 가로보강대(각파이프) 규격변경

· 도면 : □-100×40×4.2t → 변경 : □-125×75×2.3t

· 도면규격의 각파이프4.2t는 시공성 및 품질확보를 위해 2.3t로 변경

※ 구조계산서를 통해 안전성 확인

- 단가 및 산출수량

· 기존 내역에 없어 가로보강대(□-125×75×2.3T) 신규단가적용

********************************************

· ***************

※ 일위대가, 수량산출서, 구조계산서 붙임참조

· 단가비교

구 분	당 초	변 경	증 감
규 격	*************	*************
단 가	**********	**********	************

※ 거래가격, 물가자료 등에 도면상의 □-100×40×4.2t 동일규격이 없어,        □-100×50×4.2t으로 비교 검토

② **************************************

**********************

· 현황 : ****************************

· 변경 : *****************

※ 벽체 모르타르 면처리 시 열차운행에 의한 진동으로 박리현상 우려

- 단가 및 산출수량

· ****************************

· ***********************

□ 검토결과 및 처리의견

○ ******************************* ********************************************************

○ ******************************* *********************

○ 상기 건에 대한 실정보고 승인이 타당하고 향후 설계변경처리

※ 공사비 변경 현황                                   (단위 : 원)

구 분	규 격	공사비			비고
		당초	변경	증감
①스크린도어상부벽
가로보강대	□-125×75×2.3t 아연각관@600	*	**********	*************
②기능실 면처리
시멘트모르타르바름	내벽, 18㎜	**********	*	*************
콘크리트 면처리	내벽	*	*******	*************
직접공사비계		**********	**********	*************

□ 향후계획

○ ’23. 1. 실정보고 승인처리 (도철건축부→건설사업관리단)

○ ’23. 8. 공사 준공 시 내역반영(6차 공사)

붙 임 : 설계변경 실정보고 승인 요청 1부.  끝.