문서번호	조경과-372
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
최은정	김흔진	구동근	이이동		01/17 이수연
협 조
	전략기획실장			김중태
	총무과장			박신근

안전하고 쾌적한 관람환경 조성을 위한 -

「2022년 서울대공원 산책로 정비사업」추진계획

2022. 1.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

안전하고 쾌적한 관람환경 조성을 위한 -

「2022년 서울대공원 산책로 정비사업」추진계획

동물원 둘레길 및 만남의 광장 조성으로 이용객이 급증하고 있어 산책로 주변 시설물 정비를 시행하여 안전한 보행환경 제공 및 공원이용 만족도 향상에 기여하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

1		추진배경 및 방향

□ 2021년 무료개방으로 동물원 둘레길 이용객이 증가함에 따라 둘레길 이용객의  편의제공 및 만남의광장 주변 걷고싶은 그늘길(산책데크) 조성으로 공원 이용 만족도 향상

□ 시설물 노후화로 이용에 불편을 주는 시설물 및 산책로를 개선하여 중대재해처벌법 시행에 대비하고, 이용자들에게 안전하고 쾌적한 보행환경 제공

2		‘ 21년 동물원 둘레길 산책로조성 추진현황

□ 위    치 : 동물병원앞 ~ 맹금사삼거리(L=1km)

※ 동물원 둘레길 총 구간중 주 차량통행 구간으로 산책로 조성 완료

□ 공사기간 : 2021. 9. 2~10.31

□ 공사내용 : 산책로(야자매트, 데크로드)조성, 배수로정비, 수목식재 등

□ 공 사 비 : ****************************************

□ 조성사진

산책로(야자매트) 조성	산책로(데크로드) 조성

**********************************

3		사업개요

□ 위    치 : 동물원둘레길 등 2개소

□ 사업기간 : 2022. 1 ~ 6.

□ 사업예산 : *********

□ 사업내용 : 산책로 개설, 쉼터조성, 노후시설물 정비, 수목식재 등

위 치	규 모	정 비 내 용	소요예산 (천원)	비고
동물원 둘레길	******	쉼터조성 , 노후시설물, 안내판 정비 등	*******
만남의 광장 주변 녹지대	******	산책로 개설(데크로드), 위험수목 정비 등	*******

※ 동물원 둘레길 노후 배수로 정비는 시설과에서 본예산 활용하여 공사 시행

4		세부 추진방법

□ 사업비 : *********

구 분	사 업 비 (천원)	설계용역비 (천원)	공 사 비 (천원)	비고
계	*******	******	*******
동물원 둘레길 산책로 정비사업	*******	*****	******
만남의 광장 주변 녹지대 산책로 조성사업	*******	******	*******

□ 실시설계용역 : 수의계약

○ 설계용역비 : ********

○ 계약방법 : 수의계약(소액)

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항제5호

□ 공사시행 : 공개경쟁 입찰

○ 공 사 비 : ***********************

□ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 산림내 이용시설 정비 및 관리, 시설비 및 시설부대비, 시설비

5		향후 추진일정

□ 2022. 1. ~ 2. : 현장조사, 설계용역 시행

□ 2022. 3.       : 공사 발주 및 계약

□ 2022. 4. ~ 6. : 공사시행 및 준공

붙임. 1. 위치도 및 현황사진 1부. 끝.