문서번호	목동사업과-279
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장	체육시설관리사업소장
고무근	김규태	문상규	01/10
			오종범
협 조

-신월야구공원 -

조명시설 구매설치 추진 계획

2023.  1.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 신월야구공원 -

조명시설 구매설치 추진 계획

2008년 신월야구장 부설후  메탈 조명등 및 조명시설물의 장기간 사용으로 노후되어 야간경기 경기력 저하, 정상경기운영에 지장을 초래하고 있어  조명등을 LED조명등으로 교체 설치하고 노후된 자동제어설비 및 앵글을 개량하여 야구경기 및 행사준비에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추진배경

□ 조명타워 6개소, 96개 조명등이 장기간 사용으로 노후된 메탈라이트등임

◯ 2008년에 설치되어 장기간 사용으로 노후되었고, 조도 불량, 점등시간 장시간 소요(30분 이상), 고전력 소모로 에너지낭비, 부점등(13개) 되는 일이 지속적 발생

□ 앵글부분(조명지지대/조명타워 상층부) 녹이 심함

◯ 조명타워 상단부(앵글 가이드부분)가 녹슬고 파손되어 안전사고

위험 상존, 야구장(공원) 미관 저해

□ 자동제어설비

◯ 메탈라이트등에서 LED 조명등으로 교체시 자동제어설비 교체등

□ 현장사진

신월야구장 조명등 교체	조명탑 앵글 녹슴	자동제어설비 교체

Ⅱ		개선방안

□ 사업내용

◯ 조명타워 조명등(LED 1200W이내)설치 및 기존 메탈라이트등 철거 96개

◯ 조명타워용 동력(제어간선일체)간선

변전실 > 심판실 > 조명타워상단부 > 전력간선 일체  교체 및 자동제어설비 설치

◯ 노후 앵글부분 등 설치

Ⅲ		추진계획

□ 설계용역 발주 계획

*************************

❍ 업체선정: 엔지니어링 사업자 등록 업체 중 조명설비 관련 설계 유경험 업체

**************************

❍ 계약방법: 수의계약

❍ 예산과목: 관광체육국 체육정책과,체육,시민체육및국제스포츠진흥발전,시민체육공간확충(체육진흥기금),야구장 시설 개보수,시설비 및 부대비

□ 공사 발주 계획

❍ 사업목적 : 노후, 고장 등으로 인해 잦은 오동작이 발생하는 조명설비 일체를 교체하여 안전한 신월야구장 사용 환경 조성

❍ 사업내용 : 조명등 및 자동제어설비 등 교체

***************************

****************************

❍ 계약방법 : 규격/가격 동시입찰

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조

❍ 규격/가격 동시입찰 사유

- 조명등 및 자동제어 설비는 제조사마다 규격, 품질, 성능, 안정성이 다르고   일반경쟁으로 구매 시 제품 규격이 검증되지 않은 부적격업체가 낙찰받을 경우 품질 저하 및 하자보수가 어려울 우려가 있어,

- 우수한 품질의 조명설비가 설치될 수 있도록 “지방자치단체를 당사자로 하는  계약에 관한 법률”시행령 제18조에 의거 규격/가격 동시입찰을 진행하여 계약에 소요되는 시간을 줄여, 야구시즌이 시작되기전(3월말)까지 공사를 완료코자 규격/가격 동시입찰방식으로 계약을 진행하고자 함

❍ 예산과목

- 구매설치비 : 관광체육국 체육정책과,체육,시민체육및국제스포츠진흥발전,시민체육공간확충(체육진흥기금),야구장 시설 개보수,시설비 및 부대비

- 심의위원회 심의수당 : 체육시설관리사업소, 목동사업과, 시민체육시설 운영 및관리, 체육시설운영및유지관리, 일반운영비, 사무관리비.

□ 추진일정

◯ ‘23. 1. 13 : 설계용역 발주

◯ ‘23. 2. 10 : 구매설치 계약 및 감리용역 발주

◯ ‘23. 3. 31 : 설치완료(준공)

※ 공사일정, 안전관리 등을 고려하여 일정이 변경될 수 있음.  끝.