문서번호	공원여가정책과-501
결재일자	2023. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원관리팀장	공원여가정책과장		푸른도시여가국장
조아현	허현수	김인숙		01/11
				유영봉
협 조

2023. 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

2023. 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

2023. 1.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023. 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

모든 시민들이 편하고 안전하게 공원을 이용할 수 있도록 장애요소를 최소화하고 환경을 개선하는 서울형 무장애 친화공원 조성사업을 추진하고자 함

□ 추진배경 및 목표

ㅇ 사회적 약자를 배려하는 시대적 분위기와 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 구축에 대한 필요성 증대

ㅇ 「서울특별시 무장애 친화공원 기본계획 보고서(2014)」를 바탕으로 공원의 특성을 감안하여 공원의 장애요소를 최소화하고 이용에 편리하게 정비

□ 사업개요

ㅇ 사업기간: 2012 ~ 2023년

ㅇ 사 업 비: 10,072백만원 (기본계획용역 256, 공사 9,816 ※ 물가상승률 감안)

ㅇ 사업내용: 접근성 · 안전성 개선, 편의성 증진, 이용성 도모 등

ㅇ 대 상 지: 시 직영공원 14개소

- 여의도, 보라매, 월드컵(평화, 하늘, 노을, 난지천), 천호, 선유도, 북서울꿈의숲, 남산, 서울숲, 길동생태, 중랑캠핑숲, 서서울호수, 용산가족, 간데메, 응봉

ㅇ 연도별 추진실적(`12년~'21년)  ※ 11개 공원 조성 완료, 1개 조성 중(용산가족)

○ 2010. 7.  : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증에 관한 규칙 제정(무장애 인증기준 마련)

* 여의도공원 : '13년 예비인증, '14년 본인증 획득, '19년 인증 만료

*‘서울형 무장애 친화공원’ 기본계획(2014) 수립

○ 2021. 12. : 최초로 공원조성계획 입안(신설공원)하는 경우 BF 인증 의무화

구 분	계	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
개소수	12개소	1개소	1개소	기본 계획 용역	1개소	2개소	2개소	1개소	1개소	2개소	1개소	1개소
공원명	-	여의도* (시범조성)	보라매		월드컵 (평화)	월드컵 천호	선유도 북서울꿈의숲	서울숲	남산	중랑캠핑숲 길동생태	서서울호수	용산가족
사업비 (백만원)	8,056	200	1,195	256	1,100	929	742	1,372	1,016	916	157	173

□ 추진사항

ㅇ 무장애 친화공원 기본계획 및 가이드라인, 유니버설 디자인 기준 준용

- 공원시설은 장애인과 비장애인이 함께 이용 가능한 통합시설로 계획

- 통합시설 도입이 한정적인 경우, 안내시설에 BF 영역 표시 및 해당 시설은 픽토그램 등을 활용하여 안내

ㅇ 교통약자를 위한 편의시설 보완과 공원 노후·위험 시설 정비 병행

- 노인, 영유아 동반 이용자들 편의증진을 위한 시설 도입 및 환경 개선

- 경계턱 낮춤, 미끄럼방지, 핸드레일, 유도선·사인몰 등 보행자 중심의 동선 개선

ㅇ 장애인, 전문가, 이용자 등 각계 각층의 다양한 의견 수렴

- 현장 여건 변화 및 의견 수렴결과에 따라 기본계획 검토 후 정비내역 변경 및 신규 정비대상 발굴 가능

□ 사업개요 및 추진일정

공 원 명	응봉근린공원(대현산 배수지 공원)	간데메근린공원
위 치	성동구 금호동1가 1-72 일대	동대문구 답십리동 471
사업기간	'22. 7월 ~ `23. 10월	'23. 1월 ~ `23. 10월
사업면적	75,570㎡	15,180㎡
예 산 액	1,605,760천원 (명시이월: 1,400,000천원,‘23년: 205,760천원)	402,880천원 (`23년: 402,880천원)
시행기관	동부공원여가센터	북부공원여가센터
주요내용	진입도로 해빙시설 설치, 운동시설, 핸드레일, 포장교체, 화장실 리모델링 등	점자블록 정비, 볼라드 교체, 포켓쉼터 조성, 트렌치덮개, 음수대 교체, 전망공간 조성 등
추진일정	·'22. 7월 ~ 10월 : 사업 계획 수립, 기술용역타당성 심사 ·'22. 11월 ~ `23. 4월 : 설계용역, 심의 시행 ※ `22.11.17. 1차 전문가 자문 시행 ·'23. 5월 ~ '23. 9월 : 공사발주 및 시행	·'23. 1월 : 사업 계획 수립 ·'23. 2월 ~ 5월 : 설계용역 시행 (전문가 자문, 설계심의 등) ·'23. 6월 ~ 9월 : 공사시행 (완료)

□ 행정사항

○ 계획 시달 및 사업비 재배정 : 공원여가정책과

- 무장애 친화공원 가이드라인, 서울 유니버설디자인 통합가이드라인(공중화장실편 적용안내서 포함) 제공 포함

○ 실시설계 및 공사시행 : 동부공원여가센터(응봉), 북부공원여가센터(간데메)

- 전문가 자문 및 이용자 의견수렴, 사전심의 시행

- 착공 및 준공보고 시행

붙임 1. 기본계획(안) 1부.

2. 무장애 친화공원 정비사례 1부.

3. 무장애 친화공원 가이드라인, 유니버설디자인 통합가이드라인 1부(별첨).  끝.