문서번호	기전과-520
결재일자	2023. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		01/12
		代박신범
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「송파역 3,4번 출입구 임시폐쇄에 따른 공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「송파역 3,4번 출입구 임시폐쇄에 따른 공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

2023. 1. 12.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

송파역 3,4번 출입구 임시폐쇄에 따른 공사 중 교통안전시설물 설치 공사(신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□「송파역 3,4번 출입구 임시폐쇄에 따른 공사 중 교통안전시설물  설치공사(신호) 원인자 부담공사 공사기한 연장 요청」의 건

ㅇ ********************************************

□ 교통신호기 원인자부담공사 승인 통보

ㅇ 동부도로사업소 기전과-5211호(2020.05.22.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 송파역 3,4번 출입구 임시폐쇄에 따른 공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 송파구 가락동 479

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******* ***********	********	********	********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************

□ 변경사유

o 토목공정 지연에 따른 절대공기 부족

Ⅳ		검토 의견

□ 공사 중 임시 교통안전시설물 설치 후 철거 완료된 상태

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 원인자부담공사 승인 통보 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.