문서번호	공원운영과-682
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장	중부공원여가센터소장
김근혁	박종환	이인수	01/13
			하재호
협 조

중부공원여가센터 남산청사 에너지 진단 계획

2023. 1.

중부공원여가센터

(공원운영과)

중부공원여가센터 남산청사 에너지 진단 계획

「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」에 의거 중부공원여가센터 남산청사 에너지 진단을 시행하여 에너지효율 향상을 추진코자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 에너지 진단 규정 [산업통산자원부 고시]

- 진단기관으로부터 에너지 이용 현황 파악, 손실요인 발굴 및 에너지 절감을 위한 최적의 개선안을 제시하는 기술컨설팅 제도

ㅇ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 제7조

[산업통상자원부 고시 제2020-197호, 2020.11.19.]

- 건축 연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물을 소유한 공공기관은 5년마다 에너지 진단 전문기관으로부터 에너지 진단을 받아야 한다.

ㅇ 에너지 이용 합리화법 제36조 [에너지 진단 주기 등]

연간 에너지사용량	에너지 진단주기	비고
20만 toe 이상	1. 전체진단 : 5년 2. 부분진단 : 3년
20만 toe 미만	5년	우리 센터 해당

□ 추진방향

ㅇ「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 시행

ㅇ 에너지 진단 결과에 의거 효율 개선이 기대되는 사업 의무 시행

- 에너지 절감 기대효과가 5% 이상이고 투자비 회수 기간이 10년 이하인 개선안은 24 ~ 25년 개선사업으로 시행

Ⅱ		시설현황

□ 건축물

시설명	상태등급	안전등급	시설규모			준공년도
			층수	연면적(㎡)	구조
남산청사	**	*	***** ** ****	*******	***** ********	****

□ 전기설비

구 분	품 명	사 양	수 량	준공년도
전기설비	*****	*******	***	****
	***	*********	***	****
	***	******	**	****
발전기	*****	*********	**	****
태양광 설비	**************	**********	**	****
조명	***	****	******	****

□ 기계·소방설비

구 분	품 명	사 양	수 량	준공년도
보일러	*******	************	**	****
소방설비	********	*****************	**	****
	********	****	**	****
	**********	****************	**	****
	**********	*************	**	****
시스템 냉·난방기	***	***************************************	****	****
	***	***********************************	***	****
급수펌프	*******	*************	**	****
배수펌프	*******	******************	**	****
	********	*******************	**	****
	****	********************	**	****
공조설비 (열교환기)	*****	*******************	**	****
	*****	*******************	**	****
팬	***************	************************ ******************	**	****
	******	***********************************	**	****

Ⅲ		세부 추진계획

□ 에너지 진단개요

ㅇ 진단 추진 단계

단 계	주 요 내 용
사전조사	▶ 에너지 이용설비 및 설비관련 현황 파악, 에너지 사용 형태, 설비의 운용현황 파악 등 현장 진단을 위한 사전 조사
현장진단	▶ 에너지 운영 시스템 점검, 설비별 운전 성능 및 운전 상태를 파악하고 측정 정비에 의한 현장 중심 진단 시행 ▶ 에너지 손실요인 및 개선방안을 도출하고 개선안 투자 경제성 분석
분석 및 보고서 작성	▶ 현장 진단 시 도출된 개선방안을 상세 분석하고 에너지 진단 보고서 작성

ㅇ 진단 내용

- 건축물 : 구조체의 연관류율 및 건물 냉·난방 부하 산출 등

- 난방 및 급탕설비 : 보일러 등 열전환설비의 상태 및 성능시험 등

- 냉·난방 및 공조설비 : 냉·난방기기 성적계수 및 성능시험 등

- 수·배전설비 : 설비 통합관리 및 운전 분석 등

- 동력 및 조명설비 : 적정용량 및 이용 실태 개선 등

- 에너지 관리 기준 : 이용실태 개선(관리시스템 구축 여부 진단)

ㅇ 진단 소요일수 : 24일

- 연면적 3,000 ~ 10,000㎡ 미만 적용

진단대상 건축물의 연면적	소 요 일 수				소요 인력 (인)	총 소요일수 및 인력
	현장 진단	프로그램 평가	보고서 작성	합계
3,000 ~ 10,000㎡ 미만	4	2	2	8	3	24
10,000 ~ 30,000㎡ 미만	5	2	3	10	4	40
30,000 ~ 60,000㎡ 미만	6	3	4	13	5	65
60,000㎡ 이상	7	4	4	15	6	90

※ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 [별표1: 진단 소요일수 등의 기준]

□ 에너지 진단 용역 추진 계획

ㅇ 용 역 명 : 2023년 남산청사 에너지 진단 용역

ㅇ 용역업체 : **************************************

ㅇ 용역기간 : 2023. 2. ~ 4.

ㅇ 소요예산 : *****************************************

ㅇ 계약방식 : 1인견적 수의계약

- 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제25조 제1항 제5호

- 사    유 : 추정가격 2천만원 미만의 소액이며, 에너지 진단 경험이 많은 업체와 수의 계약하여 정확하고 신속한 에너지 진단을 받고자 함

ㅇ 예산과목

- 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비

□ 추진일정

ㅇ 2023. 1월 ~ 2023. 2월 : 에너지 진단 용역 발주

ㅇ 2023. 2월 ~ 2023. 4월 : 에너지 진단 용역 계약 및 착수·시행

ㅇ 2023. 4월              : 에너지 진단 용역 완수 및 결과 보고

Ⅳ		기대효과

□ 공공기관 에너지 진단 기준에 따른 항목 세부화

ㅇ 에너지 진단 항목 세부화에 따른 맞춤 개선사항 도출

□ 남산청사 에너지 진단 결과에 따른 절감 방안 도출

ㅇ 에너지효율 개선안 발굴 시 23 ~ 24년 에너지 절감 보강공사 추진

따로붙임  1. 용역비 산출내역서 1부.

2. 비교견적서 각 1부.

3. 과업지시서 1부. 끝.