문서번호	원무과-626
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
김종민		이덕우	01/13
			이윤수
협조
	주무관		정상진

2023년 은평병원 기계설비 성능점검 추진 계획

2023. 01.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2023년 은평병원 기계설비 성능점검 추진 계획

우리병원 기계설비의 안전 및 성능 확보를 위해, 기계설비에 성능점검 계획을 보고 드림

□ 추진근거

○ 기계설비 유지관리기준(2021.8.9, 국토교통부고시 제2021-1013호)

○ 2023년 은평병원 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획(원무과-525, 2023.1.11.)

□ 추진계획

○ 대    상

건 축 물 명	연면적 (㎡)	용 도	선임 등급 (유지관리자)	성능점검 기준일 (기존 건축물)
서울특별시은평병원 (은평구 백련산로 90)	18,406	의료시설	중 급	2023.4.18

- 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 : <붙임> 참조

○ 용역기간 : 2022.1. ~ 6.30

※ 1~3월 중 냉방설비 가동 불가능 → 1차와 2차(6월)로 구분 성능점검

○ 방    법 : 해당 전문업체를 통한 성능점검

○ 추진내용

구 분	내 용	점검자
성능점검 (유지관리기준 제11조)	- 연 1회 이상 성능점검을 실시하며 점검 후 기계설비 성능점검표 작성 및 기록 보존(10년) - 법 제17조 제3항에 따라 자치단체장의 점검기록 제출 요청 시 그 결과 보고서 제출	성능점검 대행업체

○ 소요예산 : ********

- 산출내역 : *****************************

- 예산과목 : 은평병원 운영, 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 행정사항

○ 추진일정

- 2023.01.13.             : 성능점검 계획 수립

- 2023.01.27.까지         : 성능점검 용역 발주 및 계약

- 2023.01.27. ~ 02.28.까지 : 성능점검 1차 완료(냉방설비 제외)

- 2023.3.31일까지         : 성능점검 결과보고서 제출(병원 → 은평구청)

- 2023.03.    ~ 06.30.까지 : 성능점검 완료(2차) 및 준공

○ 냉각설비(냉각탑 등)를 제외한 기계설비 성능점검은 2월까지 완료

- 성능점검 결과를 도기본에 통보(리모델링 실시설계에 참고자료로 활용)

- 기성금 청구에 따라 부분준공금(1차) 지급(3월 예정)

- 냉각설비(냉각탑 등)에 대한 성능점검(6월) 완료 후 준공금 지급

붙 임 : 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 1부.  끝.

<붙 임> 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황

구 분	점검대상	설치여부		수 량	유지관리 점검주기	성능 점검주기	에너지원
열원 및 냉난방설비	냉동기(냉온수기)	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	냉각탑	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	축열조	□ 설치	■ 미설치	**
	보일러	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	열교환기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	팽창탱크	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	펌프(냉･난방, 급수)	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	1년
	신재생에너지 (지열, 태양열, 연료전지)	□ 설치	■ 미설치	**
	패키지에어컨	■ 설치	□ 미설치	***	6개월	1년
	항온항습기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
공기조화설비	공기조화기	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	팬코일유닛(FCU)	■ 설치	□ 미설치	****	6개월	1년
환기설비	환기설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	필터	□ 설치	■ 미설치	**
위생기구설비	대소변기, 세면기 등	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
급수･ 급탕설비	급수･급탕설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	고･저수조	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
오수정화 및 물재이용설비	오수정화설비	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
	물 재이용설비	□ 설치	■ 미설치	-
배관설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
덕트설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
보온설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
자동제어설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년
방음･방진･ 내진설비	-	■ 설치	□ 미설치	**	6개월	1년