등록번호

치수과-527

★주무관

치수팀장

치수과장

안전건설교통국장

등록일자

2023.1.13.

황상규

안봉섭

김규엽

01/13

정욱성

결재일자

2023.1.13.

공개구분

부분공개(5)

협  조

2023년 하수시설물(하수관로·빗물받이) 준설사업 추진계획

안전건설교통국

치    수    과

2023년 하수시설물(하수관로·빗물받이) 준설사업 추진계획

우리구 관내 하수시설물(하수관로, 빗물받이)에 대한 준설 실시로 우기철 침수예방과 악취 발생 요인을 사전에 해소하여 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추 진 방 향

▢ 집중호우에 대비한 중점관리구역 및 저지대 취약지역의 우기 전 준설 완료

▢ 지역 특성을 고려한 우선 준설지역을 선정하여 시행

○ 수해 중점관리구역 및 저지대 취약지역 우선 준설 시행

○ 하수악취 관리지역 및 관광특구 지역 하수관로 세정 및 빗물받이 준설 시행

○ 전통시장, 지하철역사 주변 빗물받이 집중 청소 시행

▢ 일반지역은 CCTV 촬영 및 현장점검 등으로 퇴적상태 확인 후 준설 조치

Ⅱ		하수시설물 현황

▢ 하수관로 265㎞(원형관로 236㎞, 사각형거 29㎞)

▢ 빗물받이 15,715개소

Ⅲ		예 산 현 황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 과 목		예 산 액	비 고
총 계			2,173
2023년 관내 하수도 준설공사(연간단가)	구 비	치수과, 하수시설관리, 풍수해 예방관리 및 준설, 하수도 준설공사, 시설비 및 부대비, 시설비	1,400	준설토 처리비용 포함
	시 비	물재생계획과, 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수관로 유지관리비, 수선유지비(시비)	305
	합 계		1,705
2023년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가)	구 비	치수과, 하수시설관리, 풍수해 예방관리 및 준설, 관내 빗물받이 준설공사, 시설비 및 부대비, 시설비	300
	시 비	물재생계획과, 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수관로 유지관리비, 수선유지비(시비)	168
	합 계		468

Ⅳ		세부 추진계획

▢ 하수관로 준설사업 시행

○ 집중강우 중점관리구역 및 저지대 취약지역 주변 준설

- 대상구역 : 을지로, 다동, 무교동, 광희동, 동대문역사문화역 일대 등

- 규    모 : 하수관로 흡입 및 바켓 준설(약 13.1㎞)

- 추진기간 : 2023. 3. ~ 12.

※ 집중강우 중점관리구역 5월 말까지 100% 준설 완료, 일반지역 6월 말까지 70% 이상 준설 완료

- 추진방법

· 진공흡입 준설차량 활용

· 차량진입 곤란 또는 진공 흡입 부적정 지역은 바켓 준설기 활용

○ 하수악취 관리지역 주변 하수관로 물청소(세정)

- 대상구역 : 관내 전통시장, 음식점 밀집지역 주변, 관광특구(명동 일대), 신당동 일대, 시청 주변

- 규    모 : 하수관로 세정(약 12.5㎞)

- 추진기간 : 2023. 3. ~ 12.

- 추진방법 : 하수관로 고압 물청소(세정)

▢ 빗물받이 준설사업 시행

○ 우기 대비 빗물받이 준설

- 대상구역 : 관내에 설치되어 있는 전체 빗물받이

- 규    모 : 빗물받이 인력 및 흡입준설(약 15,715개소)

- 추진기간 : 2023. 3. ~ 12.

※ 집중강우 중점관리구역 및 저지대 취약지역, 빗물받이 집중 청소지역 조기 준설 완료(5월 말까지)

※ 관내 전체 빗물받이 우기 전 100% 준설 완료(6월 말까지)

○ 빗물받이 집중 청소지역 및 하수악취 관리지역 주변 준설

- 대상구역 : 빗물받이 집중 청소지역(지하철 역사 주변), 관내 전통시장, 관광특구(명동일대) 등

- 규    모 : 빗물받이 인력 및 흡입준설(약 6,375개소)

- 추진기간 : 2023. 3. ~ 12.(연 2회 이상 실시)

※ 단, 황학동 중앙시장은 준설예산 범위내에서 연 3회 이상 준설 실시

○ 태풍 및 가을철 빗물받이 낙엽 제거

- 대상구역 : 관내 간선도로 주변 등

- 규    모 : 빗물받이 낙엽 제거(약 4,730개소)

- 추진기간 : 2022. 9. ~ 11.

※ 간선도로 주변으로 낙엽 퇴적량이 많은 구간 선별 후 중점적으로 제거

Ⅴ		향 후 계 획

▢ 2023. 2. : 사전심사(계약심사 · 일상감사) 의뢰 및 공사 발주

▢ 2023. 3. : 공사 계약 및 착공

▢ 2023.12. : 공사 준공

Ⅵ		행 정 사 항

▢ 하수도 및 빗물받이 준설공사와 준설토 처리용역으로 분리 발주 시행

붙 임 : 1. 주요 준설 대상지역 위치도 1부.

2. 2023년 하수관로 및 빗물받이 준설계획(물량) 1부.

3. 예산배정 내역(서울시) 1부.  끝.