문서번호	토목부-890
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
박희정		최진우	01/16
			이임섭
협조
	주무관		조재근

(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

지하차도 구조물 방수수량 오류 및 누락반영 검토보고

2023.1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

지하차도 구조물 방수수량 오류 및 누락 반영 검토보고

월드컵지하차도 구조물 외부방수 수량의 오류 및 누락분 반영에 대한 책임건설사업관리기술인의 검토의견을 보고드림

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리

○ 규    모

- 지하차도 신설(폭 4차로, 연장 540m)

- 도로확폭(양방향 각 1개 차로, 총연장 582m)

○ 총사업비 : 56,069백만원(도급비 49,970, 관급비 6,099)

○ 공사기간 : '19.8.1 ~ '23.03.31

○ 시공사: 삼부토건(주)           ○ 감리사: 동부엔지니어링(주)

□ 건설사업관리단 보고내용(제2자유입건 제2023-13호, `23.1.13.)

○ 실정보고 사유

- *******************************************************************************************************************.

○ 실정보고내용

************************************

U-TYPE				BOX-TYPE
수량산출서		설계도		수량산출서		설계도
시공이음부 (벽체)	보강부 (상부)	시공이음부 (벽체)	보강부 (상부)	시공이음부 (벽체)	보강부 (상부)	시공이음부 (벽체)	보강부 (상부)
L=0.3m	-	L=0.5m	-	L=0.3m	L=0.15	L=0.5m	L=0.3m

************************************************************************

***********************************************

*******************************************************************************************

- 신축이음부 외부방수 수량의 누락

U-TYPE	BOX-TYPE

****************************************************************

**********************************

********************************************************

※ 설계도면 상세도

시공이음부	시공이음부	보강부 상부	신축이음부 벽체, 슬라브

*************************

평 면 도	측 면 도

*************************************************

○ 수량 증·감

구 분	단위	당 초			변 경			증,감			비고
		슬래브	벽 체	합 계	슬래브	벽 체	합 계	슬래브	벽 체	합 계
U-TYPE	m2	5,417	2,342	7,759	5,330	2,665	7,995	-87	323	236
BOX-TYPE	m2	9,874	4,490	14,364	9,941	4,923	14,864	67	433	500
연결통로	m2	196	476	672	196	476	672	-	-	-	변경없음
배관샤프트	m2	10	39	49	10	39	49	-	-	-	변경없음
합 계	m2	15,497	7,347	22,844	15,477	8,103	23,580	-20	756	736

○ 공사비 검토

(단가 : 원, 금액 : 천원)

공 종	규 격	단 위	당 초			변 경			증 . 감		비 고
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
3. 구조물공
.2.08 방수공
..a 구조물방수	바 닥	m2	15,497	23,663	366,706	15,477	23,663	366,232	-20	-474
..b 구조물방수	벽 체	m2	7,347	23,664	173,858	8,103	23,664	191,747	756	17,889
직접공사비		식			540,563			557,980		17,417
제 잡 비		식			133,317			137,472		4,155
공 급 가 액		식			673,880			695,452		21,572
부가가치세		식			67,388			69,545		2,157
도급공사비		식			741,268			764,998		23,730
관급자재비		식
총 공 사 비		식			741,268			764,998		23,730

*************************************

****************************************

□ 검토의견

****************************************************************************************************************************

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 건에 대한 책임건설사업기술인의 검토의견이 타당하다고 판단되어 ***************************************하고, 추후 설계변경시 반영 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업기술인 검토의견서 1부.  끝.