문서번호	조경과-596
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
이승주		신재원	01/16
			안수연
협조

2023년 도시 소생태계 조성 사업 추진 계획

- 2023년 도시 소생태계 조성 -

사업 추진 계획

2023.  1.

푸른도시여가국

(조 경 과)

2023년 도시 소생태계 조성 사업 추진계획

공공건축물 옥상에 소생태계를 조성하여 도시지역의 생태적 건강성을 증진하고, 자연학습의 장 역할도 하는 생태적 징검다리를 조성하고자 함

□ 추진 근거

ㅇ「자연환경보전법」제54조(국고보조)

ㅇ「서울특별시 도시녹화 등에 관한 조례」제8조(공공공익시설의 녹화기준 및 녹화계획)

ㅇ 환경부 도시소생태계 조성사업 추진 지침

□ 추진 실적(’21~’22)

ㅇ 대 상 지 : 공공건물 옥상

ㅇ 조성실적 : *****************

구분	계	2021	2022
대 상 지	*	*********	**********
개 소 수	*	*	*
면 적(㎡)	***	***	***
총사업비(백만원)	***	************	**************

ㅇ 조성사진

*******************	********************

□ 추진 계획(’23)

ㅇ 대 상 지 : ****************

ㅇ 규    모 : ****

ㅇ 사 업 비 : ******************** ※ ’22년 대비 110백만원 증

ㅇ 사업기간 : 2023. 1. ~ 10.

ㅇ 사업내용 : 생태형 습지, 수목 식재 등 옥상 비오톱 조성, 학습 및 휴게공간 설치

ㅇ 위치도 및 현황사진

*****************************************************************

ㅇ 대상지 현황

- (자연) ****************************************

- (인문) ************************************************************************************

- (건물) ************************************************************

ㅇ 추진일정

- ’23. 1.       : 사업계획수립 및 시달

- ’23. 2. ~ 6.  : 구조안전진단, 실시설계용역, 설계심의 등

- ’23. 7. ~ 10. : 공사시행 및 준공

□ 세부 추진 계획

ㅇ 주변 서식 생물을 유인하기 위해 인근 자연생태환경과 연계한 소생태계 조성

- 조류 및 곤충 등 인근 생물 유인 및 서식을 위한 식이식물과 다층식재 고려

- 생물이 서식할 수 있도록 생태형 습지 및 우수를 유입시킬 수 있는 시설 설치

ㅇ 옥상 비오톱 조성에 따라 건축물의 안전, 식물 생육환경 조건 고려

- 건축물 안전에 위험이 없도록 배수, 풍압, 수목 전도 등 충분한 안전 대책 고려

- 식물이 특수한 환경에서 잘 생육할 수 있도록 수종, 토심, 멀칭재 등 적극 고려

ㅇ 자연학습 및 휴식 공간 조성을 통해 시민들의 자연 체험 유도

- 생물서식공간을 사업면적의 70%로 확보하여 도심 속 생태계 확충

- 생물 서식공간(핵심지역)과 사람 이용공간(전이지역)을 구분하여 조성

- ***********************************

※ ****************************************************************************************

□ 행정사항

ㅇ 중대재해처벌법 관련 사항 이행 철저

- 예정가격 작성 시 안전보건관리비 반영 및 사업장 안전점검 관리 철저

- 용역·공사비 교부 요청 시, 산업안전보건비 등 안전관리비용 반영된 원가심사 결과서 및 설계내역서 제출

ㅇ 착·준공 시 5일 이내 보고 및 관련 서류 일체 제출 철저

- 착공 보고 시, 옥상녹화 협약서 사본(전문) 및 자체점검표 제출

- 준공 보고 시, 자체점검표, 옥상녹화 관리대장, 공사전·후 대비사진 등 제출

붙임  1. 사업추진 절차 1부.

2. 도시소생태계조성 사업 추진조건 1부.

3. 사업추진 관련 각종 서식 각 1부.  끝.