시   민

문서번호	시설관리과-1170
보존기간
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설관리팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
이덕규		김주경	윤복철	01/19
				유재명
협 조
	급수운영과장				이규희
	급수관리팀장				양봉우
	주무관				김종섭

2023년 노후밸브 정비 추진계획

2023.01.18.

강동수도사업소

2023년 노후밸브 정비 추진계획

녹 발생 등으로 수질사고 우려가 높은 노후 밸브를 내식성 재질의 밸브로 교체하여 내구성 향상 및 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위한 노후밸브 정비 추진계획을 보고 드림

□ 추진 근거

ㅇ 「수도법」제2조(책무)

④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며, 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.

ㅇ 「지방공기업법」시행규칙 제19조(감가상각의 방법) 제1항 제1호

- 건축물 등의 내용연수표(수도관 부속설비 20~30년) 【별표2】

ㅇ 노후밸브 정비 중장기 추진계획 변경(본부장 방침 ’16.10.10)

ㅇ 2023년 노후밸브 정비계획 알림(본부 시설관리과-28344(2022.12.28.)

□ 사업개요

ㅇ 목표물량: 366개소(노후밸브 227, 소화전용 노후밸브 139)

ㅇ 사 업 비: 2,283백만원(노후밸브 2,116백만원, 소화전용 노후밸브 167백만원)

ㅇ 사업내용: 고장 또는 녹물발생 우려가 있는 ’95년 이전 회주철 밸브 정비

□ 2022년 추진실적

구분	목표	실적	정비율(%)	비고
계	376	312	83.0
노후 밸브	237	222	93.7
소화전용 노후밸브	139	90	64.7	소방비 예산 부족으로 미달성

□ 2023년 추진계획

ㅇ 노후밸브 정비                                   (단위: 개소, 백만원)

구 분		계	급수운영과	시설관리과
목표 수량	계	227	200	27
	350㎜ 이하	225	199	26
	400㎜ 이상	2	1	1
사 업 비		2,116	1,864	252

ㅇ 성과관리 및 경영실적평가 대상 사업으로서 사업소별 목표관리 시행

- 사업소 경영실적 평가에 반영, 성과관리(BSC)에 따른 분기별 목표관리

- 분기별 정비목표(1분기 12, 2분기 76, 3분기 75, 4분기 64)

구별	계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	비고
송파구	200	9	22	25	20	20	23	23	29	29	급수
강동구	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	시설
계	227	23	28	28	23	23	23	28	28	23

※ 회주철 밸브 잔량 비율로 배분

ㅇ 소화전용 노후밸브 정비(소방재난본부 관리 대상)

(단위: 개소, 백만원)

구 분	계	급수운영과	시설관리과
목 표 수 량	139	83	56
사 업 비	167	100	67

- 지하식 소화전 밸브실은 적벽돌 쌓기가 생략된 소화전실(축소형) 설치

- 소화전용 노후밸브 정비는『소화전 설치․보수』사업의 예산과 구분되므로 분리 집행 (소방재난본부 예산 재배정 받아 집행)

□ 추진방법

ㅇ 연차별 정비계획 물량의 조기 정비추진을 위한 우선순위 조정

- 노후 잔여 물량 비율이 많은 350mm 이하 밸브를 집중 정비

ㅇ 400mm 이상 대형밸브 정비는 대부분 광범위한 단수 지역을 수반함에 따라 정비 시 단수 민원 및 혼탁수 발생 우려 상존

- 노후 상수도관 정비공사 등과 연계하여 정비

- 수계 전환이 곤란한 대규모 단수 예상 지역은 부단수 차단공법 활용

ㅇ 소·중블록 단위의 노후밸브 정비추진

- 재개발·재건축 대상지 제외

- 노후 상수도관(송배수관, 배급수관) 정비대상 구간은 해당 사업으로 정비

ㅇ 정비방법

- 현장조사 및 도로굴착 협의 → 노후밸브 교체·정비 → 상수도 GIS 입력

□ 행정사항

ㅇ 과별 소관 노후밸브 정비 추진(시설관리과 총괄)

ㅇ 노후밸브 정비실적 월보 제출(본부 시설관리과 다음달 10일까지)

ㅇ 소화전용 노후밸브 정비실적 분기별 제출(본부 시설관리과에 다음달 10일까지)

ㅇ 성과관리시스템(BSC) 실적 입력

붙임  1. 본부 방침서 1부.

2. ‘노후밸브 정비’ 실적 제출 양식(월보) 1부.

3. ‘소화전용 노후밸브’ 정비 실적 제출 양식(분기별) 1부.

4. 노후밸브 전체현황 1부.  끝.