문서번호	자연생태과-1300
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	자연생태기획팀장	자연생태과장		푸른도시여가국장
이유림	신현호	한정훈		01/19
				유영봉
협 조

2023년 유아숲체험시설 조성사업 추진계획

2023년 유아숲체험시설 조성사업 추진계획

2023. 1.

푸른도시여가국

(자연생태과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 유아숲체험시설 조성사업 추진계획

숲이 양호한 지역에 유아숲체험시설을 조성하여 유아가 숲에서 마음껏 뛰놀고 자연과 교감하는 등 유아들의 전인적 성장에 기여코자 함.

□ 추진근거

ㅇ「유아숲 체험시설 이용활성화 기본계획」(’17.02.02., 시장방침)

ㅇ「산림교육의 활성화에 관한 법률」제12조

ㅇ「서율특별시 산림교육 활성화에 관한 조례」제4조

□ 사업개요

ㅇ 대 상 지 : 숲이 양호한 지역(시유지 등 국공유지 우선)

ㅇ 조성목표 : 총 402개소(유아숲체험원 77, 유아동네숲터 325)

ㅇ 사업기간 : 2011 ~ 2023년

ㅇ 사업내용 : 흔들밧줄 건너기, 대피소 등 숲체험시설 및 숲터 조성

※ 유아숲체험원 주요시설물 : 흔들다리, 모래놀이터, 밧줄오르기, 인디언집 등

ㅇ 총사업비 : ************************

ㅇ 추진실적 및 계획

구 분	합계	~'16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년	비고
소 계(개소)	402	41	92	118	73	43	26	8	1
유아숲체험원	77	41	6	5	11	8	4	1	1
유아동네숲터	325	-	86	113	62	35	22	7	-

※ 유아숲체험시설 면적기준에 따른 유형구분

□ 유아숲체험원: 5천㎡이상

□ 유아동네숲터: 5천㎡미만(일반적으로 300㎡ 내외 수준)

□ ’22년 추진실적

ㅇ 대 상 지 : 구로구 개웅산 등 15개소

ㅇ 사업내용 : 유아숲체험원 신규조성 및 재정비, 유아동네숲터 발굴

ㅇ 사 업 비 : ******

ㅇ 추진현황 : 총 15개소 조성완료

- 유아숲체험원(8) : (신  규 3) 구로 개웃개웃(’22)

성북 오동공원, 금천 개미(사고이월 ’21년→’22년)

(재정비 4) 종로 삼청, 강서 꿩고개, 강동 일자산, 동작 상도/현충

(대피소 1) 성동 금호/대현

- 유아동네숲터(7) : 중구, 성동, 광진, 동대문, 은평, 마포, 관악 각 1개소

<구로 개웃개웃 유아숲체험원>	<금천 개미 유아숲체험원>	<종로 삼청 유아숲체험원>
<동작 상도 유아숲체험원>	<성동 금호 유아숲체험원 대피소>	<광진 유아동네숲터>

□ 현장점검 및 의견수렴에 따른 조치(개선)계획

ㅇ 현장점검 및 이용 만족도조사 실시

<점검 및 조사개요>

- 기    간 : 2022. 4. ~ 7.

- 대    상 : 산림이용팀장 등 5명 / ’21년 정기이용기관 원장 및 교사 454명

- 방    법 : 편의시설 부족, 시설노후 등에 대한 현장점검 및 구글 링크로 설문조사

- 조사결과

① 동대문구 배봉산 유아숲체험원 데크 부식에 따른 이용금지 조치

② 필요 시설물에 자연형 놀이시설> 화장실> 음수대 순으로 응답

※ 「산림이용 프로그램 점검결과 보고」 자연생태과-28318(2022.8.3.)

<조치계획>

① ’23년 동대문구 예산 반영********으로 재정비사업 추진

② 신규 및 재정비사업 추진 시 참고하여 지속 반영

ㅇ 유아숲지도사 대상 의견수렴

<조사개요>

- 기    간 : 2022. 12. 8. ~ 12. 16.

- 대    상 : 유아숲체험원에 배치된 유아숲지도사 109명

- 방    법 : 질문지법

- 조사결과(조성부분)

① 야자매트, 나무블럭 등 노후시설 정비, 지도사 근로환경 개선(대피소 내 냉방시설 등)

② 놀이용 밧줄 추가설치 요구

③ 성동구 매봉산 유아숲체험원 화장실 및 수도시설 설치 요구

※ 「유아숲교육 운영 관련 설문조사 결과 보고」 공원여가사업과-4211(2022.12.21.)

<조치계획>

① ’24년 재정비사업 예산 확보하여 노후시설 정비 및 대피소 환경개선 추진

② 놀이용 밧줄 등은 구 자체 예산으로 추가설치

③ 대상지 현장조사 및 수요조사 실시하고(성동구) 반영여부 결정 후 ’24년 예산 확보

□ ’23년 추진계획

ㅇ 대 상 지 : 중구 매봉산 등 9개소

ㅇ 규    모 : 신규조성 1개소, 재정비 5개소, VIP존 3개소

ㅇ 추진기간 : 2023. 1. ~ 12.

ㅇ 사업내용 : 유아숲체험원 신규조성 및 재정비, 서울엄마아빠VIP존* 조성

	서울엄마아빠VIP존*
▸ 대 상 지 : 유아숲체험원 3개소(가족 단위 이용객이 많은 곳 선정) ▸ 조성규모 : 20㎡ 내외(휴식형) ▸ 추진내용 : 자녀의 놀이모습을 볼 수 있도록 전면 시야가 개방된 휴게공간 마련, 엄마, 아빠 등 양육자 대상 프로그램 운영이 가능하도록 내부공간 조성 ※ 여성가족정책실 추진 ｢엄마아빠 행복 프로젝트｣ 관련

※ 서울엄마아빠VIP존 조성사업은 별도 세부계획 수립 추진

ㅇ 사 업 비 : 1,653백만원

구 분	자치구	위 치	규모(㎡)	사업비(천원)	최초조성	비고
합 계				*********
신규조성(1)	중구	신당동 산40(매봉산)	10,000	*******	-
재정비(5)	서대문구	홍제동 산1-1(인왕산)	10,000	*******	2014
	동부센터	성수동1가 720(서울숲)	10,000	*******	2015
	동대문구	휘경동 산6-83(배봉산공원)	10,000	*******	2013	지역건의
	강서구	내발산동 산19-1(우장공원)	10,000	*******	2012	지역건의
	성동구	옥수동 436-9(매봉산)	10,000	*******	2018	지역건의
서울엄마아빠VIP존 조성(3)		유아숲체험원 내 3개소	20	*******	-
부대비		-	-	*****

ㅇ 추진방법

<유아숲체험원>

- 기존 지형을 최대한 보존하고, 인공시설물 설치 최소화

- 유아 특성을 고려하여 안전하게 활동할 수 있도록 공간 및 시설배치

- 유아숲체험원 조성사업은 산림사업으로 추진시 해당 법 및 절차 준수

※ 안전사고 예방을 위한 설계, 감리, 안전관리계획 수립 등은 「산림자원의 조성 및 관리에

관한 법률」 및 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」에 따라 시행

- 도입시설물은「2022년 서울시 도시공원 안내체계 개선」에 맞게 적용

- 조성 후 유아숲체험원 등록(자치구 → 북부지방산림청)

<유아동네숲터>

- 운영 중인 유아동네숲터의 진입로, 숲길, 잡목을 정비하고 고사목 등

현장목 활용하여 자연물 놀이감으로 제공(사전 안전조치 필)

□ 추진일정

- ’23. 01.       : 계획 수립․시달(시→구), 기관별 계획 수립

- ’23. 01. ~ 05. : 실시설계 및 설계심의(구→시)

- ’23. 06. ~ 12. : 공사 시행 및 준공

□ 행정사항

ㅇ 유아숲체험시설 조성 관련 준수사항(자치구, 공원여가센터)

- 연내 예산집행을 목표로 설계용역, 공사발주 등 신속한 사전절차 이행

- 준공일로부터 7일 이내 보고 절차 이행(붙임 양식 참조)

- 보도자료 제공, 준공식 등 행사에 대해서는 시(자연생태과)와 사전협의

ㅇ 설계심의 운영기준

-「2023년 자연생태 분야 설계심의 추진계획」자연생태과-844(2023.1.13.)호에

따라 심의추진(내부심의 : 총공사비 2억 이상~5억 미만, 외부심의 : 5억 이상~10억 미만)

ㅇ 사업 추진에 따른 중대재해 발생 예방대책 마련 시행(자치구, 공원여가센터)

- 사업 추진 단계별 관리점검 절차 포함하여 계획 수립

붙임  1. (양식) 설계심의 요구서 1부.

2. (양식) 준공보고서 1부.  끝.