문서번호	소방행정과-632
결재일자	2023. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이영범	원유성	한종승		01/25
				오재경
협 조

- 국가산업단지 대형건물 신속한 현장 대응을 위한 - 119안전센터 및 훈련장 신설 타당성 조사 계획
0.5

2023. 1.

금천소방서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

119안전센터 및 훈련장 신설 타당성 조사 계획

□ 안전 사각지대를 해소하고 대형건물 재난현장의 선제적 대응을 위한 『119안전센터 및 고층훈련장 신설』사업의 기본구상 및 실현방안을 조사하고자 함

Ⅰ		추진 근거

「지방소방기관 설치에 관한 규정」[별표2] “119안전센터 설치기준”

- 인구 5만명 이상 또는 면적 2㎢ 이상

본부 소방행정과-1733(2023.1.18.)호『2023회계연도 정책사업비 및 기본경비 기관별 재배정계획서 알림』

	119안전센터 신설 필요성
○ 인구 23,748명(주간 정주인구 14만 명), 면적 2.52㎢ ○ 〈2021년 재난발생 현황〉화재발생 91건, 구조활동 992건, 구급활동 2,221건 - 1일 평균 출동 화재 0.25건, 구조 2.72건, 구급 6.08건 ○ 서울디지털국가산업단지(2·3단지) 현황 - 부지면적 1,469,595㎡, 91개동, 입주업체 9,536개소 * 2단지 패션디자인산업(출판, 영화비디오제작, 패션디자인) / 3단지 지식·정보통신산업(모바일게임 소프트웨어개발, 유무선통신업) ○ 지하철1호선(경부선) 경계 가산동 서쪽지역 직근 출동로 부재, 우회 출동으로 골든타임 확보 곤란(금천소방서) ○ 금천소방서(4.0㎞) 지휘부, 특수차 등은 디지털산업단지 서쪽지역 후착대 도착

경부선 철도

구로119안전센터 ⇒ (1.5km,약3분)		가산디지털 단지역(서쪽)		⇐ 구로 공단119안전센터(1.9km, 약4분) ⇐ 금천소방서(4.0km, 약9분)

Ⅱ		사업 목적

119안전센터 건립부지 입지와 사업규모의 적정성을 조사하고 재정적·경제적으로 분석하여 소요부지 확보 방법 등 종합적인 사업계획 수립

재난 발생시 신속한 현장 대응을 위한 최적의 사업부지와 시설계획 등에 대한 공공성과 경제성을 비교·분석하여 사업실행 계획의 최적방안을 도출

국가산업단지 내 대형건물 밀집에 따른 고층 훈련장 신설의 필요성과 기본구상 및 운영방안을 모색

Ⅲ		사업 개요

사 업 명 : 119안전센터 및 고층훈련탑 신설 타당성 조사 용역

위    치 : 가산동 국가산업 3단지 가산디지털단지역 인근

사업기간 : 2023. 3. 1. ~ 8. 31.

소요예산 : 100,000천원

과업내용

○ 119안전센터 및 고층훈련장 신설 부지선정(소방환경 조사 및 사업방향 수립)

○ 적정입지를 포함한 기본구상 및 종합·정책적 실행계획안 제시

○ 관계기관 의견 수렴 및 공공성·경제성을 반영한 최적 방안 도출

Ⅳ		추진 일정

기본계획 수립 : 1월

기술용역심사 : 2월(기술용역심사 담당관)

계역의뢰 및 계약체결 : 2월

용역기간 : 착수일로부터 6개월

붙임   서울특별시 소방서 표준 면적 기준 1부.  끝.