문서번호	공원시설과-558
결재일자	2023. 1. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원시설과장	공원부장		한강사업본부장
신승민	양돈욱	김상국		01/25
				주용태
협 조
	주무관		박근용

2023년 한강공원 수영장 보수공사 추진계획

2023. 1.

공  원  부

공원시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 한강공원 수영장 보수공사 추진 계획

한강공원 야외수영장 및 물놀이장을 이용하는 시민의 안전확보 및 쾌적한 물놀이공간 조성을 위한 2023년 보수공사 추진 변경 계획을 보고 드림.

□ 시설현황

○ 수영장 6개소, 물놀이장 2개소

구 분	수 영 장						물놀이장
	뚝섬	광나루	잠실	잠원	여의도	망원	난지	양화
면 적(㎡)	21,000	9,630	27,945	23,325	20,000	22,293	7,040	7,800
수조면적(㎡)	4,640	1,806	5,102	4,800	5,200	5,300	3,500	1,700
수 조 수	4	2	3	3	4	3	1	1
수용인원(명)	3,500	1,200	3,400	3,000	3,600	3,300	1,100	600
조 성 년 월	2009.7	1991.8	1990.8	1989.8	2009.7	1991.8	2009.7	2015.4

□ 공사개요

○ 공사명 : 2023년 한강공원 수영장 보수공사

○ 공사대상 : 수영장 3개소 (뚝섬, 잠원, 여의도), 물놀이장 2개소 (양화, 난지)

- 잠  실 : 자연형 물놀이장 조성공사 시행 (2023.11. 준공 예정)

- 망  원 : 성산대교 성능개선공사 (2018.~2025.12.) 이후 개장 예정

구 분		공사물량	사업비(천원)
계			3,649,000
실시설계용역		․ 수영장 보수공사 시설분야 실시설계	30,000
수 영 장 공사	소계	․ 한강공원 수영장 보수공사	3,593,000
	시설분야	․ 수조 방수(양화) 및 토사유입 방지 시설 ․ 휴게시설 설치, 수목식재, 배수로 정비 등 ․ 수조 벽체 및 테두리 등 도색, 계단보수 ․ 노후 포장 교체, 수조 주변 미끄럼 방지 포장	1,280,000
	기전분야	․ 수영장 여과기 교체 8대(여의도, 뚝섬, 난지) ․ 여과기 분해, 조립 및 보수 ․ 샤워기 설치·분해정리 및 정비 ․ 기계실 배관 교체, 기전설비 시험가동 등	2,313,000
폐기물 처리 용역		․ 폐콘크리트, 혼합폐기물 1식	26,000

□ 세부추진 계획

실시설계용역

○ 용 역 비 : 30백만원 (시설분야 설계비)

○ 용역기간 : 착수일로부터 25일 이내

○ 과업규모 : 한강 수영장 및 물놀이장 5개소 유지보수 실시설계

○ 계약방법 : 수의계약 (여성기업)

- 수영장 개장일 전 보수 완료를 위해 조속한 현장조사 및 설계 완료가 가능한 전문 엔지니어링 업체와 수의계약 시행

보 수 공 사

○ 공 사 비 : 3,593백만원

○ 공사기간 : 착공일로부터 2023.11.30.까지

- 수영장 개장 전 주요 공정 완료, 운영기간 유지관리 시행

○ 시행방법 : 효율적 사업관리를 위해 공종별 분리 발주

○ 발주방법 : 일반경쟁입찰

- 입찰참가자격

• 수영장 시설 정비 : 조경공사업

• 여과기 등 기계설비 : 기계설비공사업

폐기물 처리용역

○ 용 역 비 : 26백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 2023.11.30.까지

○ 시행방법 : 수의계약

□ 향후 추진일정

○ 2023. 1. : 기술용역 타당성 심사 의뢰

○ 2023. 2. : 실시설계용역 시행

○ 2023. 3. : 계약심사

○ 2023. 3. ~ 5. : 공사발주 및 주요공정 완료

○ 2023. 6. ~ 8. : 수영장 개장 기간 유지관리

○ 2023. 9 ~ 11. : 운영종료 후 시설 보수

○ 2023. 11. 30.  : 공사준공

붙임  1. 2023년 한강공원 야외수영장 보수내역 1부.

2. 한강공원 수영장 및 물놀이장 여과기 교체 계획 1부.  끝.