문서번호	도로보수과-857
결재일자	2023. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이상구		김순수	01/26
			이도헌
협조
	주무관		강병국

2023년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

『안전하고 쾌적한 포장도로 유지관리를 위한』

'23년 노후포장도로 정비공사 추진계획

2023. 1.

북부도로사업소

[도로보수과]

2023년 노후포장도로 정비공사 추진 계획

『안전하고 쾌적한 포장도로 유지관리를 위한』

'23년 노후포장도로 정비공사 추진계획

Ⅰ		관 련 근 거

□ ’23년 노후포장도로 정비공사 예산 재배정 통보

○ 도로관리과-359호(2023.1.6) : '23년 도로포장 정비계획 및 예산 재배정 알림

⇒ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로    정비공사(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비

□ 노후포장도로 예산 재배정 현황               (단위 : 백만원)

구 분	합 계	노후포장도로 정비공사	긴급복구공사 (물고임포함)	불량맨홀정비 (이월예산포함)	고강성 콘크 리트포장	재료비 등
금 액	15,716	9,291	2,173	2,361	1,750	141

Ⅱ		추 진 방 향

□ 아스팔트 포장 시공품질 향상

○ 아스팔트 포장 공용수명 증대

- 일반차로 1등급 골재 사용(화랑로 중온아스콘 포함) 및 버스차로 고내구성(개질SMA) 포장

○ 아스팔트 생산 및 현장시공 관리감독 강화

- 합동점검 : 서울시 도로관리과, 품질시험소, 사업소

- 시공 현장 및 아스팔트 플랜트 공장 점검 : 책임감리원, 품질감리원

○ 아스팔트 구매 방법

- 개질SMA(SMA포함) 및 중온아스콘 : 총액계약 조달청 계약 의뢰

- 일반, 순환아스콘 : 공사별 현장여건 및 공사구간을 반영하여 다수공급자계약(조합구매 포함) 또는 다수공급자계약 2단계경쟁 제안공고 구매

□ 노후포장도로 정비공사 예산집행 : 상반기 60% 이상

○ 선금 및 공사기성금 지급, 관급자재비 선고지 등을 통해 조기집행 목표달성 집중추진

Ⅲ		세 부 추 진 계 획

□ 도로보수과 사업별 예산 배분

사 업 명	구 분	예산(백만원)	비 고
합 계		18,003
노후포장도로 정비공사	1 구역	4,646
	2 구역	4,645
긴급복구공사		3,003	긴급복구(1,892) 야간출동(700), 물고임(281), 공동복구(130)
불량맨홀 정비공사		2,361	'22년 불량맨홀 정비(886)
			'23년 불량맨홀 정비(1,475)
PC콘크리트포장	버스정류장 설치	1,750	서울시 특정기술선정심사
노면표시 유지관리	노면표시 연간단가	855	노면표시 유지관리(855) 미재정
도로·교통부속물 유지		442	도로시설물(350), 교통운영과(92)
도로옹벽 정밀안전점검 용역	추가 지정분 포함	20	도로사면 정비(20)
노면표시 공사비	공사노면표시	미배정	노후포장(1,2구역), 긴급복구, 굴착복구 노면표시공사
굴착복구공사	유관기관 복구의뢰	미배정	'23년 포장도로 굴착복구공사
노면표시 감리비	공사노면 감리비	100	노면표시, 노후포장(1,2구역), 긴급복구, 굴착복구공사 감리
직영반 수거폐기물 운반처리 용역	직영반 운영	20	노후포장 정비(20)
도면제작 용역	포장 공사	20	노면표시 유지관리(20)
기타예산	사무관리비 공공운영비 재 료 비	141	직영장비 재료비 등 상온·가열아스콘 구매 직영 노후장비 교체구매

※ 노면표시 설치공사는 추후 예산 재배정시 공사별 계획물량을 반영 시행

□ 노후포장도로 정비공사(1,2구역) 추진 계획

○ 1,2구역으로 분할하여 시행 : 공사 집중에 따른 지연시공 방지

1구역	3개 노선	일반도로 : 동일로, 화랑로, 도봉로. 버스차로 : 화랑로.
2구역	10개 노선	일반도로 : 율곡로, 사직로, 진흥로, 평창문화로, 아리랑로, 한천로, 상계로, 방학로, 월곡로, 시루봉로.

○ 2023년 노후포장도로 정비공사(1,2구역) 개요

1) 노후포장도로 정비공사 - 1구역

- 사업개요 : 절삭후 덧씌우기(t=5cm 1,120a, t=10cm 291a)

- 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2023.12.31일까지

- 사 업 비 : 4,646백만원

- 입찰방법 : 일반경쟁

2) 노후포장도로 정비공사 - 2구역

- 사업개요 : 절삭후 덧씌우기(t=5cm 1,260a, t=10cm 189a)

- 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2023.12.31일까지

- 사 업 비 : 4,645백만원

- 입찰방법 : 일반경쟁

□ 발주 및 착수

○ 발주 시행

- 서울시 계약심사 및 일상감사 의뢰하여 결과통보후 공사 발주 시행

○ 실공사 착수 : 관급자재 선정시험 의뢰 및 결과 통보 후

- 노후포장도로(1,2구역) : 4월~5월(공사전 홍보 등)

□ 품질관리 철저

○ 품질시험 강화

- 선정시험(재료) : 아스콘 납품회사별 서울시 품질시험소 의뢰

- 혼합물 관리시험(재료) : 1일 노후포장 정비시 품질시험소 의뢰

- 시공관리시험(코아)    : 노선별마다 코아 채취후 품질시험소 의뢰

○ 혼합물 생산과정, 품질확보 및 시공현장 감독 철저

- 플랜트 점검 및 공사현장에 책임감리 상주 등 관리감독 철저

○ 중대산업재해 안전확보를 위한 안전교육 실시

(중대재해처벌법 제4조, 제5조, 제9조 참조)

- 교육일시 : 공사, 용역업체 확정후 (3~5월)

- 아스콘 생산업체, 시공, 용역업체 및 책임감리단과 합동 안전교육

· 위험성평가 실시 : 착공후 실착공 전(책임감리단 지도 아래 자체 평가)

· 안전보건협의체 구성 및 현장관계자 회의 개최(월 1회)

· 근로자 안전관련 의견 제시 청취 및 개선여부 점검(분기별 1회)

· 기준과 절차에 따라 공사, 용역 안전점검 실시(책임감리단, 연1회 이상)

Ⅳ		향 후 계 획

○ '23. 1 ~ 2 : 공사 일상감사 및 계약심사 의뢰 및 심사결과 후 발주

○ '23. 3 ~ 12 : 공사계약 및 포장공사 시행, 준공처리

붙임  1. 2023년 노후포장도로 정비공사(1,2구역) 설계도서 각 1부.

2. 2023년 정비공사계획 위치도(1,2구역) 각 1부.  끝.