문서번호	급수운영과-1302
결재일자	2023. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
이재헌	전동근	박종일	01/26
			代이영세

『2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사』관련 장기계속 단가계약 2차 발주계획 보고

『2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사』관련

장기계속 단가계약 2차 발주계획 보고

2023. 1.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사』관련

장기계속 단가계약 2차 발주계획 보고

우리 사업소에서 시행 중 인 『2022년 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련하여, 당초 계약금액과 달리 물량이 증가됨에 따라 도급액이 조기 소진될 것으로 예상되어 아래와 같이 2차 발주 계획을 보고드림

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

ㅇ 위    치: ************************************

*****************************

ㅇ 발주내역: *****************

ㅇ 계약기간: 착공일로부터 ~ 2023.6.30.까지

ㅇ 발주금액: *********************

※ 최근 3년 평균 시공물량을 산출하여 금액 산정

ㅇ 발주사유: 급수공사 및 장기사용 배급수관 정비 물량 증가에 따른 계약금액 조기 소진

☐ 현황 및 보고내용

ㅇ 2022년 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 계약기간: **************************************

- 계약금액: **************

- 계 약 자: 기성건설㈜ 대표 ***

- 계약내역: *******************

- 집행 현황

<단위: 천원>
구 분	계 약 액	집 행 액	잔 액	공사기간	비 고
*****	*******	******* **************	*******	********* *********	*******

※ 기성(2차-최종) 예상 집행액: 금 200,000,000원 ⇒ 집행 후 예상잔액(0원)

ㅇ 보고내용

- 상기 공사의 계약기간이 2023.6.30.까지이나, 급수공사 및 ’22년도 장기사용 배급수관 정비 물량 증가에 따른 당초 계약금액이 조기 소진될 것으로 판단되어 추가 발주 필요

- 계약방법

구 분	내 용
관 련 근 거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
입 찰 방 법	제한경쟁입찰(지역제한)
입찰참가 자격	상⋅하수도설비 공사업으로 제한 ※ 관련근거: 누수방지과-4413(2021.4.23.)호
주요 적용사항	⋅ 2022년도 상수도공사 기본 품셈 단가표 [안전조사과-944(2022.2.3.)호] ⋅ 대한건설협회 발표 『2022년 하반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서』 단가 ⋅ 2022년 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(2022.4.)

☐ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 실정인 바, 2022년 2차 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)에 대하여 본부 안전조사과로 심사 요청코자 하며

ㅇ 심사 결과를 반영하여 본청 재무과로 신규 계약 의뢰코자 함

☐ 행정사항

ㅇ 계약심사 의뢰(사업소→본부 안전조사과)                 ’23.01.

ㅇ 공사시행 및 계약 의뢰(사업소→본청 재무과)             ’23.02.

ㅇ 계약체결 및 착공                                      ’23.02.

붙임: 설계내역서 및 산출 근거 각 1부.  끝.