문서번호	아이돌봄담당관-1211
결재일자	2023. 1. 26.
공개여부	부분공개(5,6,7)
방침번호

			시 민
주무관		키즈카페조성팀장	아이돌봄담당관
이승현		김삼성	01/26
			김연주
협조

「4호(구로) 거점형 키움센터 조성 전기공사」

실정보고 및 계약변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 01.

여성가족정책실

(아이돌봄담당관)

「4호(구로) 거점형 키움센터 조성 전기공사」

실정보고 및 계약변경 검토보고

「4호(구로) 거점형 키움센터 조성 전기공사」관련 **************************** 공사 반영을 위한 계약금액 조정 서류가 제출되어 검토하고 보고드림

1		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 4호(구로) 거점형 키움센터 조성 전기공사

ㅇ 위    치 : 구로구 서해안로 2329 (오류동 68-35)

ㅇ 공사금액 : ************

ㅇ 공사내용 : 지상1층~7층 개보수 중 전력간선, 전열·전등, 냉난방설비 등

ㅇ 공사기간 : '22. 07. 25. ~ '23. 02. 03.

ㅇ 시공/감리 : **************

2		추진경위

ㅇ '22. 07.  25.   : 공사 착공, 현장사무실 개설

ㅇ '22. 08.~09.  : 설계도서 변경(사업계획 변경 및 공간 재설계)

ㅇ '22. 09.       : 기존시설물 내부 철거, 옥외 케이블 트레이 설치

ㅇ '22. 10.       : 간선 케이블 포설, 신규 인입선 공사

ㅇ '22. 11.       : 분전반 결선, 냉난방 배관·배선, 각층 전등설치

ㅇ '22. 12.~현재 : 전열·전등 배관 및 배선, 가구 전열기구 취부

3		실정보고 검토

□ 관련근거

ㅇ 공사계약 일반조건 제6절(설계변경) 및 제7절(계약금액 조정)

ㅇ 전기공사 실정보고 검토보고(다우티이씨2023-감03호)

□ 실정보고 내용

ㅇ 주요 변경내용 및 사유

************************************

***********************************************

*************************************************

***********************************************

**********************************

************************************************

*********************************************

**********************************

*****************************************

ㅇ 공종별 공사비 증감표 (직접공사비 기준)

(단위:원)
변경내용		공사금액			비고
		변경 전	변경 후	증·감
합 계		***********	***********	***********
1. 전기공사		**********	***********	***********
	전력간선설비	**********	**********	**********	***************************
	전열설비	**********	**********	**********	***************************
	전등설비	**********	**********	**********	*************************
	냉난방설비	**********	**********	********	************************
2-1. 한전표준공사비		**********	*********	**********	*************
2-2. 사용전검사수수료		*******	*******	*******	*************

※상세내역 붙임 실정보고 내역 등 참조

ㅇ 단가 적용기준

- 기존비목: 계약단가 적용

- 신규비목: 실정보고 기준일 조사단가 × ***************

□ 감리자 의견

- **********************************************************************************************************************

4		계약금액 변경 검토

□ 관련근거

ㅇ 공사계약 일반조건 제6절(설계변경) 및 제7절(계약금액 조정)

□ 계약금액 조정 내용

ㅇ 계약금액 조정사유

- ***************************************

- *******************************

ㅇ 계약금액 변경내용

(단위:원)

구 분		계약금액		증·감액	비고
		변경 전	변경 후
재료비	직접재료비	**********	**********	********
	소 계 (①)	**********	**********	********
노무비	직접노무비	**********	**********	***********
	간접노무비	*********	*********	**********
	소 계 (②)	**********	**********	***********
경비	산출경비	*******	*******	******
	산재보험료	*********	*********	********
	고용보험료	*******	*******	********
	국민건강 보험료	*********	*********	********
	노인장기요양 보험료	*******	*******	*******
	국민연금 보험료	*********	*********	********
	퇴직공제 부금비	*********	*********	********
	산업안전보건관리비	*********	*********	********
	기타경비	*********	*********	**********
	소 계 (③)	**********	**********	**********
순공사비 계 (④=①+②+③)		***********	***********	***********
일반관리비, 이윤 (⑤)		**********	**********	**********
고용개선 지원비 (⑥)		*********	*********	**********
한전표준공사비 (⑦)		*	*********	**********
사용전검사수수료 (⑧)		*	*******	********
공급가액 (⑨=④+⑤+⑥+⑦+⑧)		***********	***********	***********
부가세 (⑩=⑨×10%)		**********	**********	**********
도 급 액 (⑨+⑩)		***********	***********	***********

4		처리의견

ㅇ ****************************************************************************************************

붙임  1. 실정보고 서류(감리자,시공자) 1부.

2. 변경계약 요청서류(시공자) 1부.   끝.