문서번호	생산관리과-863
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
홍원해	김형준	어용선		01/27
				권민
협 조

′23년도 입상활성탄 신탄 교체 추진계획

2023. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

′23년도 입상활성탄 신탄 교체 추진계획

사용기간 경과로 흡착능력이 감소된 입상활성탄을 적기에 신탄으로 교체하여 시민들에게 깨끗하고 맛있는 수돗물 공급

Ⅰ		현 황

□ 정수센터별 교체현황

ㅇ ′18년부터 신탄으로 교체 추진(′22년까지 27,545㎥(101개지) 교체)

교체년도	합 계		광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
	구매량 (㎥)	예산 (백만원)
활성탄지수	총 160지		10지	16지	22지	20지	44지	48지
교체 합계 (′18년~′22년)	****** ******	******	***** *****	**********	***** ******	***** ******	***** ******	***** ******
잔여 교체	****** ******	******	*** *****	***** *****	***** ******	*** *****	***** ******	***** *****

※ 활성탄 연구를 위하여 각 정수장별 연구지 운용(총 6개지 : 구의1, 뚝도1, 영등포2, 암사1, 강북1)

※ 강북정수센터 ′22.5월 고도증설에 따라 신탄활성탄(2,609㎥, 12개지)은 교체계획에서 제외

※ ′22년 교체물량 중 일부 교체 진행 중 (′22년 교체기간 : ′22.11월~′23.2월)

	《 입상활성탄 교체방법 (생산관리과-9829호, 2020.9.29.) 》
□ 생물 활동이 왕성한 시기, 입상활성탄 교체공사 지양 → 동절기 교체작업 □ 하절기 교체공사 중지, 사업 리스크 최소화 → 활성탄 구매 장기계속 계약 추진 □ 위생적인 교체작업 추진 → 활성탄흡착지 내 포충기 설치 등

ㅇ 장기계속계약을 통한 안정적인 교체물량 확보

구 분	구 의	뚝 도	암 사	강 북
계약기간	2021 ~2023	2021 ~ 2023	2021 ~ 2023	2020 ~ 2023
계약량(지수)	*************	*************	*************	*************
계약액(백만원)	*****	******	******	******
생산지	중국	중국	중국	중국
계약자	삼천리활성탄소	신기화학	신기화학	㈜삼진이엔알외 3

※ 광암, 영등포정수센터는 활성탄 구매량이 소량으로 매년 계약체결

Ⅱ		′22년 추진 시 애로사항

□ 장애요인

ㅇ 전량 중국 수입에 의존, 중국시장 변동 시 대처 어려움

- 11월 교체시기에 맞추어 9월 ~ 10월에 집중 납품 추진

- 중국 코로나19 정책으로 입상활성탄 납기 지연(당초 9~10월 → 변경 10월~2월)

*******************************************************************************

ㅇ 환율 상승으로 국내 입상활성탄 가격 상승

- ********************************************************

□ 극복방안

ㅇ 하반기 집중 납품 해소를 위한 입상활성탄 연중 교체 방안 검토 중

- 관계자 회의(본부-연구원)를 통해 입상활성탄 관련방안 강구 중

ㅇ 입상활성탄 수급불안 및 환경문제 등에 상호협력 및 공동대응하고자 K-water와 입상활성탄 재생 협력 업무협약 체결 추진

Ⅲ		′23년 추진계획

□ 2023년 정수센터별 교체물량

ㅇ 6개 정수센터 ******* 교체 : ********************************

- 입상활성탄 교체시기는 수온 10℃이하 인 11월~다음연도 2월까지 추진

- ′22년 이월 물량은 ′23년 2월까지 교체,
′23년 교체 물량은 ′23년 11월부터 ′24년 2월까지 교체 추진

구 분		합 계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
교체량 (㎥)	소 계	****** ******	*** *****	***** *****	***** ******	*** *****	***** ******	***** ******
	′22년(이월)	***** ******	*	*** *****	***** *****	*	***** *****	***** *****
	2023년	****** ******	*** *****	***** *****	***** ******	*** *****	***** ******	***** *****

□ 정수센터별 소요예산 : *********

구 분		합 계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
예산 (백만원)	***	******	***	*****	*****	*****	*****	*****
	********	*****	*	***	*****	*	*****	*****
	*****	******	***	*****	*****	*****	*****	*****

Ⅳ		향후계획

ㅇ 생산부 포괄비(아리수 생산재료비)를 사업부서에 재배정 : 기획예산과

ㅇ 예산 재배정 후 입상활성탄 교체 추진 : 정수센터

ㅇ 6개 정수센터 연도별 입상활성탄 교체계획 수립 : 생산부.  끝.