문서번호	기반시설과-652
결재일자	2023. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	02/01
			김종호
협조

「한강공원 매점(난지1,2호)리모델링공사」

부력체 보강공사 실정보고 검토 보고

2023. 02.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(난지 1,2호) 리모델링 공사」

부력체 보강공사 실정보고 검토 보고

리모델링공사중 시행한 부력체 안전점검용역의 보수, 보강 필요의견에 따라 상판 교체 및 철판도장작업 등을 시행하여 시민들에게 안전한 편의시설 제공을 위한 실정보고 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 부력체 안전점검 결과 보고서[KJ엔지니어링('23.01.20.)호]

□ 실정보고 검토(감리) 보고[아이씨디건축사무소-2023-0127('23.01.27.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2022.11.14.~2023.02.11.

□ 도 급 비: 409,481,000원

□ 도 급 사: (주)하나건설이앤씨

□ 감 리 사: 주식회사 아이씨디플랜건축사사무소

Ⅲ		추 진 현 황

□ '22.11.14.: 공사 착공

□ '22.12.23.: 부력체 부식에 따른 안전점검 시행 검토 보고

○ 데크철거후 현장점검 결과 육안상 부력체 부식이 많이 진행된 상태로 안전점검 용역 시행이 필요하다 판담됨. 필요

□ '23.01.09.: 부력체 안전점검 용역 착수

□ '23.01.20.: 부력체 안전점검 용역 준공

**********************************

Ⅳ		보 고 내 용

□ 리모델링 공사중 시행한 부력체 안전점검 용역 결과에 따라 보수, 보강이 필요함.

○ 부력체 현장 사진

**	*****************		*********
*****
*****

○ 부력체 상판 일부 철거후 교체

- 상판 미교체 부분은 부식면 전처리후 도장 작업 시행

********************************

**************

********************************

**********************

**********************************

******************

*******************************

□ 단가 적용 검토

****************

******************************

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	**********
	*	***********	***********	***********

□ 공사소요기간: ****

****************

********************************

******************************************

□ 감리 검토 의견

○ 실정보고 사유는 부력체 안전점검 용역에 따라 타당하며, 단가 및 물량 검토 결과 적정함.

Ⅴ		조 치 의 견

□ 시민들에게 안전한 편의시설 제공을 위해 부력체 안전점검 용역에 따른 부력체 보수, 보강은 타당하며, 감리의견과 같이 단가 및 물량 검토 결과 적정하다고 판단됨.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자함.

붙임  실정보고 검토 보고 각1부.  끝.