문서번호	기전과-1473
결재일자	2023. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		02/02
		김은덕
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

2023. 2. 2.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 통보 3차

ㅇ 동부도로사업소 기전과-24700호 및 24703호(2022.07.01.)

□ 원인자부담공사 변경승인 요청 4차

ㅇ *******************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)

□ 공사위치 : 강동구 상일동 124

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******* ***********	********	********	*********
표 지			********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************

□ 변경사유 : 지중화 작업 지연으로 인한 준공기한 연기

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 결과 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류 1부.  끝.