문서번호	조사연구과-317
결재일자	2023. 2. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	조사연구과장		학예연구부장		서울역사박물관장
조치욱	최형수		박현욱		02/02
					김용석
협 조
	문화재관리과장					김홍진
	경영지원부장					장화영
	총무과장					김춘섭
	세계유산등재팀장					신영문

2023년 탕춘대성 시·발굴조사 계획

2023

서울역사박물관

(조사연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 탕춘대성 시·발굴조사 계획

탕춘대성에 대한 시굴 및 발굴조사를 통해 유구에 대한 조성기법을 확인하고, 한양도성과 북한산성과 연계를 통한 세계문화유산 등재에 학술적 근거를 제시하고자 함

1	추진 근거

○ 한양도성-북한산성-탕춘대성 세계유산 통합 등재를 위한

2023년 탕춘대성 학술연구 기본계획(문화본부 문화재관리과-1390, 2023.1.31.)

2	2023년도 2차 조사계획

□ 사업개요

○ 사업내용  : 탕춘대성의 시굴 및 발굴조사, 실측ㆍ사진기록ㆍ보고서 제작 등

○ 조사대상  : 서울시 종로구 부암동 산17-1 일원

○ 사업기간  : 2023.1. ~ 2023.10

○ 조사면적  : 978㎡(시굴조사 978㎡, 발굴조사 200㎡)

○ 소요예산  : 157,765천원(문화재관리과 예산 재배정)

□ 과업방법

○ 문화재청, 문화재관리과 등 관계 기관과 상시 협의 추진

○ 조사 장비 임차, 현장 제토 용역은 공개 경쟁입찰로 진행하고

변경사유(과업량 증가, 4대보험 정산 등)발생시,추가 변경 계약 추진

○ 중요한 유구나 유물이 출토시 관계 전문가 자문 등 실시

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱 ☎724-0138 조사연구과장 : 최형수 ☎0140 담당 : 조치욱 ☎0141

□ 조사 대상 지역 현황

【매장문화재 조사 계획도】

※ 2022년 1차 조사지역 성벽붕괴구간 및 치구간에 대한 시굴 및 발굴조사 실시

※ 2023년 군부대 남측 및 북측의 토성구간에 대한 2차 조사 실시

○ 기 조사현황

- 탕춘대성 정밀실측조사(2008년, 예그린건축사사무소)

: 중요 문화유적인 탕춘대성에 대한 기록 보존 및 문화재 보존 활용을 위한 정밀현황실측 설계도서 작성

- 탕춘대성 보존․관리 종합계획(2016년, 한울문화재연구원)

: 홍지문 및 탕춘대성의 종합적인 보존관리 계획 마련

․ 홍지문 및 탕춘대성 현황조사(문헌기록, 현장조사 등)

․ 홍지문 및 탕춘대성 종합정비 기본 구상

․ 홍지문 및 탕춘대성 세부 정비 계획

: 탕춘대성 사적 지정 신청에 필요한 보존관리 계획 마련

- 2022년 시굴 및 발굴조사지 선정을 위한 현장조사(2021.11)

- 2022년 치 구간 및 성벽붕괴 구간에 대한 시·발굴조사 실시

: 조사결과 성벽붕괴구간에서 판축 흔적 일부 확인

□ 조사단 구성(안)

○ 조사  단장 : 최형수(서울역사박물관 학예연구관)

○ 자문  위원 : 백종오(한국교통대학교 교수)

신희권(서울시립대학교 교수)

최종규(한울문화재연구원장)

윤성호(한성대학교 교수)

○ 책임조사원 : 최형수(서울역사박물관 학예연구관)

○ 조  사  원 : 조치욱(서울역사박물관 학예연구사)

○ 준  조사원 : 김지연(서울역사박물관 학예연구관)

○ 보  조  원 : 진정운(서울역사박물관 학예연구원)

※ 조사의 추이에 따라 개별 위원 및 조사인원의 추가 또는 변경 가능

□ 현장관리계획

○ 현장조사는 조사원인 학예연구사의 입회하에 오전 8시부터 오후 5시까지 실시(월~금)

○ 작업인부의 수기 사인으로 출근 점검 및 주1회 안전교육 실시

○ 회의 등으로 조사원의 현장 부재 중에는 학예예연구원 및 인력공급업체의

현장대리인이 현장 안전 및 인력관리

○ 외부인의 현장 방문은 사전에 의사를 밝힌 단체 및 개인에게 조사원의 안

내에 따라 현장을 공개

○ 작업현황 및 장비운용 내용을 명시한 주간업무보고는 일지 작성하여 1주 단

위로 학예연구부장 결재 시행

○ 작업시작 시 발열체크 등 코로나대응지침에 따라 현장운영

○ 중대재해특별법 시행에 따른 현장운영 체크리스트 작성 및 관리

○ 발굴조사 경과에 따라 현장공개 프로그램 운영

□ 소요예산 : 157,765천원

조사대상	구분	예산액(천원)		비고
탕춘대성	기간제근로자등 보수		45,765	문화재관리과 재배정 예산
	사무관리비	제토용역(인부임)	72,111
		차량임차 등등	7,489
		조사용품 구입(천막지 등)	8,000
		유구 및 유물 실측, 측량	20,000
		자문비	2,400
	공공운영비		2,000
		합계	157,765

- 문화본부 문화재관리과, 문화재 보존․관리․활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화, 탕춘대성 학술연구 및 보호체계 구축, 기간제근로자등 보수(100-101-04), 사무관리비(100-201-01), 공공운영비(100-201-02)

□ 추진일정

○ 2023.01~02   : 방침수립 및 예산 재배정 요청, 조사지역 경계측량

○ 2023.02        : 문화재청 허가 신청

○ 2023.03 ~ 07 : 발굴조사 실시, 자문회의 개최

○ 2023.08 ~ 09 : 완료신고 및 약보고서 제출

3	행정사항

○ 조사차량 주차장 출입승인 및 주차요금 면제(서울역사박물관 시설과)

○ 출토유물 보존처리(서울역사박물관 보존과학과)

4	기타

○ 발굴보고서는 발굴조사 완료 후 20일 이내에 약보고서를 제출, 2년

이내에 정식 보고서 발행

○ 출토 유구와 유물은 관계 법령에 따라 처리

○ 현장 조사원의 출장여비 한도내에서 실비지급(한도 월 20만원)

【군부대 북측 토성 구간 근경】

【군부대 남측 토성 구간 근경】

【조사지역 위치도】