문서번호	도시철도토목부-1365
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		代유원하	02/03
			류용열
협조
	주무관		한혜경

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사(2차)』

예비 준공검사 결과보고

2023. 02.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사(2차)』

예비 준공검사 결과보고

『별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사(2차)』에 대하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림. ※ 관련근거: 예비준공 검사(2차) 결과 보고〔유신궤감(별내) 제2023-030, 2023.02.03.〕

1		공사 개요

○ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 1,2공구 궤도공사

○ 위    치: 서울시 강동구 암사역 ~ 경기도 구리시 토평동

○ 규    모: 궤도부설 L=9.001km(콘크리트 7.593km, 자갈 1.408km)

분기기 10틀

○ 공사기간 및 계약금액                                                  (단위 : 원)

구 분	공 사 기 간	계 약 금 액	비고
총 차	2021.12.01.~2023.02.20.	5,155,253,830
1 차	2021.12.01.~2023.02.20.	21,066,910	준공
2차(금회)	2022.03.01.~2023.02.20.	5,134,186,920	진행중

○ 시 공 사: 삼표레일웨이(주)

○ 감 리 단: ㈜유신 외 1개사

2		예비준공 검사 현황

○ 일   시: '23.01.31(화), 10:00

○ 장   소: 별내선 건설공사(1공구) 상황실(2층)

○ 예비준공 검사자 : 도철토목부 유원하, 이형일 주무관

○ 예비준공 검사 입회자

- 본부 공사관리관, 기술지원건설사업기술인, 건설사업관리단, 시공사

3		2차 공사 추진 현황

○ 공정 추진 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계 약	실 적 (1/31까지)	잔 량	비 고
금 액	5,134	4,617(89.9%)	517

○ 2차 공사 시공 현황

(단위 : 백만원)

구분	공 종	단위	계 약		시 공 (‘23.01.31까지)		미시공		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
도급액				5,134		4,617		517
직접공사비				3,351		3,011		340
본선	소 계			2,683		2,343		340
	궤도부설	km	7.593	208	7.593	208	0	0
	콘크리트도상부설	km	7.593	965	7.593	835	0	130	레일연마,물청소
	분기기부설	틀	3	249	7.283	239	0.31	10
	레일용접	개소	790	39	3	39	0	0	테르밋트용접
	자재반입	식	1	250	766	241	24	9
	제표설치	식	1	352	1	352	1	0
	가설공사	식	1	51	0	0	1	51
	부대공사	식	1	136	1	136	0	0	연마차운송, 준공도서
	사급자재	식	1	110	1	54	1	56	차막이,도유기
모란차량기지	소 계			323	1	239	1	84
	궤도부설	km	1.408	646		646		0
	분기기부설	틀	7	456	1.408	456	0	0
	부대공사	식	1	111	7	111	0	0
	궤도철거	km	0.079	76	1	76	0	0
예비자재		식	1	3	0.079	3	0	0
간접공사비		식	1	22	1	22	0	0
고용개선지원비		식	1	1,626	1	1,488	1	138

4		예비준공 검사자 의견

○ 검사 항목에 의해 적정하게 수행되었으며, 준공에 차질 없을 것으로 판단됨.

5		조치 계획

○ 상기 보고내용과 같이 책임건설사업관리기술인으로 하여금 2차 공사 준공에 대해 차질없이 없도록 조치하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 예비준공검사 결과보고서 1부.  끝.