문서번호	시설과-388
결재일자	2023. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		북부공원여가센터소장
심다영	송석주	이철형		02/03
				구본상
협 조
	공원운영과장		代이지은

간데메공원 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

2023. 2.

북부공원여가센터

[시 설 과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 사회적 약자를 배려하고 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 구축을 위한 -

간데메공원 무장애친화공원 조성사업 추진계획

장애인·노약자·영유아 동반 이용자 등 교통약자를 위한 편의시설을 보완하고 장애요소를 최소화하여 모든 시민들이 편안한 공원환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진근거

ㅇ 2023. 무장애 친화공원 조성사업 추진계획[공원여가정책과-501(`23.1.11.)]

ㅇ 서울시 무장애 친화공원 기본계획 보고서(`2015)

Ⅱ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 간데메공원 무장애 친화공원 조성

ㅇ 대 상 지 : 간데메근린공원(동대문구 서울시립대로2길 59)

ㅇ 규    모 : 15,179.7m2

ㅇ 사업기간 : 2023. 2. ~ 10.

ㅇ 사업내용 : 공원 접근성·안전성 개선, 이용 편의 증진 등 무장애 친화공원 조성

- 점자블록 정비, 볼라드 교체, 포켓쉼터 조성, 트렌치 덮개, 음수대 교체 등

ㅇ 총사업비 : 금402,880천원

ㅇ 예산과목 : 공원여가정책과, 공원녹지개발 및 만족도 개선, 시민참여 프로그램 운영, 무장애 친화공원 조성, 시설비 및 부대비

Ⅲ		공원현황

ㅇ 공 원 명 : 간데메근린공원

ㅇ 위    치 : 동대문구 서울시립대로2길 59(시유지)

ㅇ 면    적 : 15,179.7m2

ㅇ 공원지정 : 서울특별시 고시 제1997-51호(1997.3.3.)

ㅇ 조성계획 : 서울특별시 고시 제1998-27호(1998.1.31.)

ㅇ 주요시설 : 팔각정, 농구장, 배드민턴장, 휴게공간 등

관리사무소	팔각정	북측 출입구	서측 출입구
다목적구장(농구코트)	휴게공간, 음수대	배드민턴장	산책로

Ⅳ		추진방향

ㅇ 장애인을 포함한 시민 모두가 함께 이용 가능한 통합시설 계획

- 무장애 친화공원 기본계획 및 가이드라인, 유니버설디자인 기준 준용

ㅇ 교통약자를 위한 편의시설 보완과 노후시설 정비 병행

- 경계턱 낮춤, 미끄럼방지, 유도선·사인몰 등 이용객 중심의 시설 도입

ㅇ 장애인, 이용자, 전문가 등 각계 각층의 다양한 의견 수렴

- 현장 여건 및 의견수렴 결과에 따라 기본계획 검토 후 정비시행

Ⅴ		시행계획

□ 실시설계용역 시행

ㅇ 소요예산 : 26백만원(추정)

ㅇ 용역기간 : 착수일로부터 90일간

ㅇ 계약방법 : 수의계약

ㅇ 자격기준

-「여성기업지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 여성기업으로, 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 건설부문(조경) 엔지니어링사업자로 신고를 필한 업체 또는「기술사법」에 따른 건설부문(조경) 기술사사무소 개설을 등록한 업체

***************************************** **********************************************

□ 공사 시행

ㅇ 소요예산 : **********

ㅇ 공사기간 : 착수일로부터 80일간

ㅇ 계약방법 : **********

ㅇ 자격기준

-「건설산업기본법」에 의한 종합건설업 중 조경공사업을 등록한 업체로서, 주된 영업소의 소재지가 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 소재한 업체

Ⅵ		추진일정

ㅇ‘23. 02.       : 계획 수립, 기술용역타당성 심사, 용역 발주

ㅇ‘23. 03. ~ 05. : 실시설계용역 시행(전문가 자문, 설계심의 등)

ㅇ‘23. 06. ~ 10. : 공사 시행 및 완료

붙임  1. 위치도 및 현장사진 각 1부

2. 기본계획 보고서 1부.  끝.