문서번호	토목부-2187
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이회진		한병찬	02/06
			이임섭
협조
	주무관		이상현

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(동절기 콘크리트 양생) 검토 보고

2023. 02.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(동절기 콘크리트 양생) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 동절기 콘크리트 양생

(한중콘크리트) 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

○ 보행교 실정보고(보차도교 한중콘크리트 양생) 승인요청(창동상계 제23-015호, `23.01.18.)

○ 1차 2회 공기연장 보고(토목부-34589, `22.11.22.)

○ 1차 1회 공기연장 보고(토목부-22835, `22.05.06.)

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 : 보행교 신설(B=10.0m,  L=115.0m)

○ 총공사비 :*****************************************

○ 사업기간 : `21. 04. 19. ∼ `24. 04. 18.

- 1차 : `21. 04. 19.  ~ `22. 12. 02.*******************************

- 2차 : `22. 10. 17.  ~ `23. 10. 16.******************************

○ 시 공 사 : ************

○ 감 리 사 : ***************

위 치 도	조 감 도

□ 실정보고 주요 내용

○ 정상 공정추진을 위한 동절기 콘크리트 양생(한중콘크리트) 시행

- 하천점용허가 지연, 동부간선도로 지하차도 건설공사 교통우회에 따른       종점부 가시설 착수지연, 수방기간 하천내 공사중지 등으로 76일 공사

지연 발생

- '23년 수방기간(5.15~10.15) 도래전 교량 하부공(교각, 교대) 및 강교

거치를 완료하고 후속 공정 정상추진을 위하여 동절기 콘크리트 양생

(한중콘크리트) 시행

○ 콘크리트 양생(한중콘크리트) 수량 ※ 실 공사물량으로 정산

- 스팀보일러 : 44일

- 콘크리트 천막보양 및 양생 : 614㎡

□ 추진경과

○ `21. 04. 19. 공사착공

○ **************************************************

- **************************

·하천점용허가 신청 : `21.07.12.

·하천점용허가 : `21.11.12.(수방기간 `21.10.15일 이후 허가)

·당초공기 : `21.04.19.~`22.04.18.

·변경공기 : `21.04.19.~`22.05.16.(증 28일)

○ ***************************************************

- ***********************************          ******************

·당초공기 : `21.04.19.~`22.05.16.

·변경공기 : `21.04.19.~`22.12.02.(증 200일)

※ 수방기간(5.15~10.15) 하천공사 중지기간을 포함한 일수이며 실 연장일수는 48일 임

□ 한중콘크리트 양생 및 공정추진 계획

○ 부재별 양생계획

- 교대 : `22.12.06. ~ `23.03.01.

구 분	양생계획도	양생기간
A1		1차 : 버림콘크리트 상온양생 2차(기초) : 2022.12.06.~2022.12.09. 3차(벽체) : 2022.12.27.~2022.12.30. 4차(흉벽) : 2022.02.03.~2022.02.06. 5차(날개벽): 2022.02.09.~2022.02.12. 양생일수 : 12일
A2		1차(버림) : 2023.01.30.~2023.01.31. 2차(기초) : 2023.02.06.~2023.02.09. 3차(벽체) : 2023.02.15.~2023.02.18. 4차(흉벽) : 2023.02.20.~2023.02.23. 5차(날개벽): 2023.02.26.~2023.03.01. 양생일수 : 13일

- 교각 : `22.12.23. ~ `23.02.15.

구 분	양생 계획도	양생기간
시 점 부 우측교각 (P1-1)		2023.01.31.~2023.02.03. 양생일수 : 3일
시 점 부 우측교각 (P1-2)		2023.01.13.~2023.01.16. 양생일수 : 3일
종점부 우측교각 (P2-1)		1차 : 2022.12.23.~2022.12.24. 2차 : 2023.01.03.~2023.01.06. 3차 : 2023.01.19.~2023.01.22. 양생일수 : 7일
종점부 우측교각 (P2-2)		1차 : 2022.12.23.~2022.12.24. 2차 : 2023.01.09.~2023.01.12. 3차 : 2023.02.12.~2023.02.15. 양생일수 : 6일

- 부재별 양생 일정

구 분	시작일	종료일	양생일자	비 고
A1기초	`22.12.06	`22.12.09	3일
P2-1,P2-2버림	`22.12.23	`22.12.24	1일	2개소 동시양생
A1벽체	`22.12.27	`22.12.30	3일
P2-1기초	`23.01.03	`23.01.06	3일
P2-2기초	`23.01.09	`23.01.12	3일
P1-2기둥	`23.01.13	`23.01.16.	3일	동바리기초(동시양생)
P2-1기둥	`23.01.19	`23.01.22	3일	동바리기초(동시양생)
A2버림	`23.01.30	`23.01.31	1일
P1-1기둥	`23.01.31	`23.01.03	3일	동바리기초(동시양생)
A1파라펫	`23.02.03	`23.02.06	3일
A2기초	`23.02.06	`23.02.09	3일
A1날개벽	`23.02.09	`23.02.12	3일
P2-2기둥	`23.02.12	`23.02.15	3일	동바리기초(동시양생)
A2벽체	`23.02.15	`23.02.18	3일
A2파라펫	`23.02.20	`23.02.23	3일
A2날개벽	`23.02.26	`23.03.01	3일
스팀양생일수합계			44일

○ 장비 및 자재 투입계획

장비 및 자재	규 격	단 위	수 량	비 고
****	******	*	*****	투입비 정산 예정
****	**************	*	*
****	********	****	**
***	*****	****	**
*****	*************	*	**
***	*****	*	*
*****	***	*	*

○ 인원 투입계획

직 종	규 격	단위	수 량	비 고
****	*********	*	*	****** **
****	*********	*	*

○ 한중콘크리트양생 시방 기준

- 한중콘크리트의 양생 종료 때의 소요 압축강도의 표준(M Pa)

단 면 구조물의 노출	얇은 경우	보통의 경우	두꺼운 경우
(1) 계속해서 또는 자주 물로 포화 되는 부분	15MPa	12MPa	10MPa
(2) 보통의 노출상태에 있고 (1)에 속하지 않는 부분	5MPa

- 소요의 압축강도를 얻는 양생일수의 표준(보통의 단면)

구조물의 노출상태	양 생 온 도	양 생 일 수
(1) 연속해서 또는 자주 물로 포화되는 부분	5℃	9일
	10℃	7일
(2) 보통의 노출상태에 있고 (1)에 속하지 않는 부분	5℃	4일
	10℃	3일

○ 공정 추진계획

- `23. 03. 03 ----------- 하부공 콘크리트타설 완료

- `23. 04. 30 ----------- 상부 강재 거치

- `23. 05. 15 ----------- 가축도 철거 및 A1, A2 법면복구

- `23. 05. 16 ~ `23.10.15 수방기잔 하천내부공사 중지 → 교량 상부공사 추진

- `23. 10. 16 ~ `24.04.18 교량상부공/포장공/호안공/조경공/부대공 등

□ 수량 증·감 내역

공 종 명	단 위	당 초	변 경	증.감		비 고
1. 한중콘크리트 양생
********	*	*	**	**	***	****
****	*	*	***	**	***	***

□ 공사비 증·감 내역

(단위: 천원)

품 목	당 초	변 경	증.감		비 고
*************	*	*******	*	*******	****
*********	*	******	*	******	****
********	*	*******	*	*******
***********	*	******	*	******
*******	*	*******	*	*******

□ 신규단가 협의

○ 협 의 일 : `23. 01. 17.(화)

○ 참 석 자 : ****************************

○ 협의결과 : **************

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
*****************	********* ********	************ **	********* ************ ***************

□ 검토결과 및 조치계획

○ `21.04.19. 착공이후 하천점용허가 지연, 인접 공사현장(동부간선도로 지하

차도 건설공사)교통우회 지연에 따른 가시설공사 착수 지연, 수방기간 하천내

공사중지 등으로 당초 계획공정 추진이 여려운 실정이며

○ `23년 수방기간(5.15~10.15 하천내 공사중지) 도래 전 강교거치 완료와 후속 공정 지연방지를 위하여 한중콘크리트 타설을 실시하고 향후 설계변경시

반영 하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부. 끝.