문서번호	기반시설과-765
결재일자	2023. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	02/06
			김종호
협조

「한강공원 매점(난지1,2호)리모델링공사」

설계변경(1회) 검토 보고

2023. 02.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(난지 1,2호) 리모델링 공사」

설계변경(1회) 검토 보고

부력체 상판 교체 및 철판도장작업 등 실정보고건에 대한 설계 변경 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경 요청서[하나(한강)제22-12('23.02.06.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(난지1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2022.11.14.~2023.02.11.

□ 도 급 비: 409,481,000원

□ 도 급 사: (주)하나건설이앤씨

□ 감 리 사: 주식회사 아이씨디플랜건축사사무소

Ⅲ		추 진 현 황

□ '22.11.14.: 공사 착공

□ '22.12.23.: 부력체 부식에 따른 안전점검 시행 검토 보고

□ '23.01.09.: 부력체 안전점검 용역 착수

□ '23.01.20.: 부력체 안전점검 용역 준공

□ '23.02.01.: 부력체 보강 실정보고

□ '23.02.06.: 설계변경위원회(내부) 개최

Ⅳ		보 고 내 용

□ 실정보고 승인건에 대한 설계변경

○ 부력체 안전점검 용역 결과에 따른 보수, 보강 실정보고

※ 기반시설과-652('23.02.01.)호

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	**********
	*	***********	***********	***********

□ 공사소요기간: 증58일

***	**	**	***
****	*********************	*********************	****

□ 조치 의견

○ 실정보고 승인 사항을 반영하여 총무과에 설계변경 요청.

Ⅴ		향 후 계 획

□ '23. 04. : 공사 준공

붙임  설계변경내역서  1부.  끝.