문서번호	영동대로복합개발추진단-1315
결재일자	2023. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장
유시혁		代양경신	02/08
			최병훈
협 조
	복합개발토목과장			이승우

영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사(토목)

설계변경 계약금액 조정 검토회의(2차) 결과보고

2023. 2.

영동대로복합개발추진단

영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사(토목)

설계변경 계약금액 조정 검토회의(2차) 결과보고

토목 4개 공구에 대하여 변경실시설계로 인한 계약금액 조정사항의 적정여부를 검토하고자 회의(2차)를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

ㅇ 일시/장소 : ’23.2.2.(목), 14:00 ~ 18:00 (공구별 회의) / 도기본 3층 회의실

ㅇ 참     석 : 총 24명

- 영동대로추진단(11) : 사업총괄과장, 복합개발토목과장, 공구별 설계·공사 담당 주무관(9)

- 계약상대자(7) : 디엘이엔씨(***), 현대건설(***), 롯데건설(***), 건화(***), 동명(***), 도화(***), 삼보(***)

- 설계감리(2) : **************

- 시공감리(4) : 1~4공구 감리단장(******************)

ㅇ 주요 안건

- 각 공구 설계변경 안건별 세부내용 설명 및 논의

□ 주요 회의내용

ㅇ 1차 회의결과에 따라 보완 제출한 설계변경 주요항목(내용/사유, 변경근거 등)에 대하여 계약상대자 설명 후 추진단, 설계·시공감리 상세 질의 및 답변

ㅇ 사업계획(규모) 변경에 따른 설계변경 외 변경 사유(기술심의·자문, 각종 인허가 및 영향평가, 관계기관 협의 등)에 대한 계약금액 조정 대상 여부 논의

- 계약상대자와 조정 대상에 대한 이견이 지속되어 계약금액 조정 요청 근거를 입찰안내서(계약 일반조건, 특수조건 등)를 기준으로 구체적으로 제시 후 재논의하기로 함

ㅇ 향후 본부 설계변경위원회 자문을 고려하여 설계변경 및 계약금액 조정 관련 자료를 보완(단가 적용 및 공사비 증감 등 포함) 하기로 함

※ 공종별 규격 및 단가 적용, 물량 변동 등에 대한 상세 내역 첨부

*********************************************************************************************

※ 보완자료 작성 및 검토 진척도에 따라 회의일시 및 자료는 유동적으로 조정될 수 있음

□ 향후계획

ㅇ ’23. 2.17. : 계약금액 조정 검토회의(3차) 개최

붙임  회의자료 및 설계·시공감리 검토의견 각 1부.  끝.