문서번호	도로보수과-1349
결재일자	2023. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정광욱		김왕주	02/09
			이경우
협조
	주무관		서효원

'23년 노후포장도로 정비사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  02.

강서도로사업소

(도로보수과)

'23년 노후포장도로 정비사업 추진계획

'23년 도로포장 정비 추진계획 및 예산 재배정에 따라, 안전하고 쾌적한 도로이용을 위한 노후포장도로 정비사업 추진과 예산집행 계획을 보고 드림.

1		관련근거

○ '23년 도로포장 정비 추진계획 및 예산 재배정 (도로관리과-336호, '23. 1. 5.)

2		추진방향

□ 장수명 및 안전한 도로 제공

○ 시공·품질 관리감독 강화로 아스콘 품질 향상 (공용수명 증대)

○ 아스콘 내구성 확보(표층 1등급)로 포트홀 등 도로파손 예방

□ 기후환경 변화 대응 (중온아스콘 시범적용)

○ 친환경 포장을 통한 집중호우 대비, 대기오염 및 폐기물 저감

3		사업예산 현황

○ '23년 본예산 기준 배정액 : ********

******************************************************************************

4		세부 추진사항

□ 시공·품질 관리

○ 감독권한 대행 건설사업관리 용역 시행 중 ('22. ~ '24.)

- 시공 시 아스콘 포장 시방 준수 여부 감독

- 아스콘 품질 확보를 위한 골재 품질 등 및 현장도착·다짐 시 온도 등 점검 수행

※ 시공현장 및 아스콘공장 사업소·용역사(감리) 합동점검 실시

○ 도로파손(포트홀, 소성변형 등) 저감 관리

- 아스콘 표층 1등급 관급자재 조달로 포장 내구성 확보 및 도포파손 저감

□ 기후환경 변화 대응

○ 친환경 포장을 통한 집중호우 대비, 대기오염 및 폐기물 저감

- 기존 아스콘 생산 및 시공 온도 30℃ 저감으로 대기오염 저감 및 시공 중 민원 저하

- 중온 아스콘 시범적용 내용 (*************)

구분		계	WC-3,6	중온	적용비율 (일반:중온)	비고
면적(a)		*******	*******	*******	*****
	1권역	*******	*****	*****	*****
	2권역	*****	*****	*****	*****
금액(백만)		*****	*****	*****	*****
	1권역	*****	***	*****	*****
	2권역	*****	***	***	*****

- 폐아스콘 재생골재 사용 (기층)

※ 사업소별 적용 현황 : 배수성포장(남부), 중온포장(강서, 북부), 재생아스콘 사용(전체)

5		사업개요 및 발주계획

□ 사업개요

○ '23년 노후포장도로 정비공사 (1·2구역)

- 대    상 : **************

- 규    모 : ******

- ************************************************

************************************************

- 기    간 : '23. 2. ~ '23. 12.

- 사 업 비 : ********

<세부내역>

구 분			계	1구역(강서,양천)	2구역(영등포,구로)	비고
총계			*****	*****	*****
	노후포장도로 정비 공사	총공사비	*****	*****	*****
		도급비	*****	****	*****
		관급비	*****	*****	*****
		이설비	***	***	***
	폐기물처리용역		***	***	***
정비면적(a)			*******	******	*****

※ 최근 3년간 정비 실적

구 분	평 균	'22	'21	'20	비고
정비면적(a)	*****	*****	*****	*****
사업비(백만원)	*****	*****	*****	*****

□ 공사 추진(발주) 계획

○ 효율적인 공사 추진을 위한 권역별 분리 발주

- 노후도로포장 도로공사는 1구역(강서,양천), 2구역(영등포,구로)으로 분리 발주

- 폐아스콘 운반 및 처리용역, 권역별(노후포장 1,2구역) 분리 발주

※ 노면표시 공사(노후1,2구역, 유지보수)는 별도 예산으로 구분되어 별도 발주 예정

○ 주요 관급자재(아스콘) 조달계획

- 계약방법 *******************

********************

**********************************

6		향후 계획

○ '23.  2. : 전문공사 발주 타당성 의뢰 (건설혁신과)

○ '23.  2. : 계약심사 의뢰 (계약심사과)

○ '23.  2. : 물품 및 용역 사전규격공개 (조달청)

○ '23.  3. : 공사발주 및 계약의뢰 (재무과)

○ '23.  3. : 입찰공고 (재무과)

○ '23.  3. : 공사 착수 및 유관기관 홍보

○ '23. 12. : 공사 준공

붙   임 : '23년 노후포장도로 정비공사 공사구간 및 포장계획 현황 1부.  끝.