아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경 계약의뢰 [2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사(2차)]

1. 우리센터에서 시행중인 『2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사(2차)』건에  대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 폐입상활성탄 준설 및 투입공사(2차)

나. 계약업체 : ㈜서원개발  대표 김현지

다. 계약기간 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 2.28.

라. 변경내역

구 분	당초금액	변경금액	증.감	비 고
총공사비	173,600,000	162,390,000	감)11,210,000
공급가액	157,818,182	147,627,273	감)10,190,909
부가가치세	15,781,818	14,762,727	감)1,019,091

마. 설계변경 사유 : 건강보험료 등 실비정산에 따른 금액변경

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비(일반재료비)

붙임 : 설계변경 결과 보고서 및 설계변경 관련자료 각 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	정상수		정수시설과장	이호완		뚝도아리수정수센터소장	02/09
정미선
협조자	주무관	장현순		주무관	권이삭		주무관	양은영
시행	정수시설과-805	(	2023. 2. 9.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 정수시설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5577	/전송	02-3146-5506	/	minjisarang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)