문서번호	토목부-2450
결재일자	2023. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		한병찬	02/09
			이임섭
협조
	주무관		도제경

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 검토보고

(신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

2023. 2.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 신림공영차고지 저류조 포함)건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 검토보고

『신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』의   물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 요청에 대한 검토보고임

[관련문서] 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제4회) 검토결과 보고[제일(발)2023-370, '23.02.06.]

Ⅰ		사 업 개 요

□ 용 역 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

□ 규    모 : 버스차고지(101대) 및 빗물저류조(V=35,000㎥)

□ 기    간 : 2018.04.02. ~ 2023.12.31.(5차 ‘22.01.01~’23.03.11)

□ 용 역 비 : 3,727,600천원(5차 916,000천원)

□ 용 역 사 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

Ⅱ		검 토 내 용

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 대상여부 : 대 상

○ 직전조정일로부터 90일 이상 경과

○ 직전조정일을 기준으로 산출 품목조정률이 100분의 3이상 증·감된 경우

구 분	검 토 항 목		검 토 내 용	결 과	비고
조정방법	계약서 명기사항 확인		품목조정률 적용	적 합
적용요건	①물가변동 경과기간	기준시점으로부터 90일 이상 경과	******* -기준시점 : 2022.01.01. -비교시점 : 2023.01.01.	적 합
	②물가변동 조정율	3/100 이상 증감	조정율 : ***** ≥ 3.00%	적 합
	③조정기준일 (비교시점)	①,② 동시 충족 되는 최초의 날	조정기준일 : 2023.01.01. (비교시점)	적 합
	④직하시점	조정율 3% 미만	2022.12.31.기준 조정율 : *************	적 합

□ 물가변동 대상금액 검토

(단위 : 백만원)

구 분	계약금액 (A)	예정공정 (B)	실행공정 (C)	빠른공정 (D=Max(B,C)	PS공정 (E)	기성공제 (G)	적용제외 (H=Max(D,E,G)	적용대가 (I=A-H)
금 액	*******	*******	*******	*******	****	*******	*******	*******
공정율	***	****	****	****	****	****	****	****

****************************************

********************************************

□ 물가변동 조정(제4회) 결과

구 분		검 토 내 용	비 고
① 물가변동 대상공사의 계약금액		**************
② 물가변동 적용 제외 금액		**************	기성금+손해배상보험
물가변동 조정기준일 현재 기술자 투입현황	투입계획	***************
	실 투입	***************
③ 물가변동 적용 대가		**************	① - ②
④ 물가변동 조정율		*****
⑤ 물가변동 등락 대상 조정 금액		***********	③ × ④
⑥ 선금급 공제 금액		*
⑦ 물가변동 조정 적용금액		***********	⑤ - ⑥

*******************************************

Ⅲ		조 치 의 견

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건에 대하여 관련 규정 및 보고서 등을 검토한 결과, 책임건설사업관리기술인 검토의견과 같이 타당한 것으로 판단되므로 승인 처리하고 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견서(보고서) 1부.  끝.