문서번호	보행자전거과-1865
결재일자	2023. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자전거도로팀장	보행자전거과장
박지훈	이덕배	02/09
		이선희

자전거 보조간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계 용역 계약변경 계획

자전거 보조간선도로망 구축을 위한

기본 및 실시설계 용역 계약변경 계획

2023.  2.

도 시 교 통 실

(보행자전거과)

자전거 보조간선도로망 구축을 위한

기본 및 실시설계 용역 계약변경 계획

자전거도로 구축을 위한 건설기술심의위원회 자문 및 관계부서 협의 등 기간이 소요되어 과업기간을 연장하여 내실 있는 결과물을 만들고자 보고드림

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 자전거 보조간선도로망 구축(상암·잠실)을 위한 기본 및 실시설계 용역

ㅇ 용역기간 : ’22. 5. 24. ~ ’23. 2. 17.

ㅇ 용 역 비 : 229,250천원(부가세 포함)

ㅇ 수행기관 : (주)KG엔지니어링종합건축사사무소, (주)문창

ㅇ 주요과업

- 자전거 보조간선도로망 현황분석 및 계획

- 자전거 보조간선도로 기본설계

- 자전거 보조간선도로 실시설계

**********

****************************************

***************************************

****************************************

**********************************************************

**********************************

***********************************

□ 변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	*******************	*******************	********
계약금액	*********	*********	****

ㅇ 변경사유 : **************************************************

ㅇ 귀책사유 : 없음

ㅇ 지체상금 : 미부과

□ 향후 일정

ㅇ 변경계약 의뢰(재무과)	: ’23. 2. 10.

ㅇ 최종보고	: ’23. 3.

ㅇ 용역준공	: ’23. 4.

붙   임   1. 계약변경 및 용역기간 조정 요청(용역사) 공문 1부.
2. 합의각서 1부.  끝.