아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	「진접선 차량기지 건설사업」총사업비(사업기간) 변경 요청

1. 우리 본부에서 시행 중인「진접선 차량기지 건설사업」관련입니다.

2. 진접선 총사업비 및 도급계약에는 창동차량기지 철거가 포함되어 있으나 해당 공사기간이 총사업비(사업기간)에는 미반영 되어 있어 변경요청 하오니 조치하여 주시기 바라며,

3. 특히, 총사업비 관리지침 제28조(다음 연도 완공사업 등에 대한 총사업비 협의)에 의거 올해 5월 31일 까지 기획재정부장관에게 총사업비(사업기간) 변경 등에 대해 조정 요구해야 함을 알려드리니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

* 당고개~진접 복선전철 건설사업 총사업기간 : 2010년 ~ 2024년

* 진접선2공구 공사기간(창동차량기지 철거 포함) : 2018년 ~ 2026년

붙임   1. 최종 총사업비(18차) 협의 서류 1부.

2. 최초 도급계약서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통정책과장), 도시철도설계부장
주무관	장대성		토목2과장	박형복		도시철도토목부장	전결 02/13
류용열
협조자	주무관	김봉성		주무관	배상현
시행	도시철도토목부-1747	(	2023. 2. 13.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로, 8 프리미어플레이스 9층	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2622	/전송	02-6438-2649	/	stress76@seoul.go.kr	/	부분공개(5)