문서번호	물재생계획과-2170
결재일자	2023. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
지풍근		정한영	02/14
			함명수
협 조

하수도 정비사업 추진 계획 변경 보고

2023. 2.

물 재 생 계 획 과

(하수관리팀)

하수도 정비 사업 추진 계획 변경 보고

「도신로 4길21-1 주변 사유지 내 하수관로 이설공사」와 관련하여 사유지 통과 하수관로(D1,000mm, L=54m) 이설을 위해 수리검토 및 하수관로 통수단면 결정을 검토코자 기본 및 실시설계 수행에 대한 검토 보고임

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 도신로4길 21-1 주변 사유지 내 하수관로 이설공사

ㅇ 공사규모 : 하수관로 이설 D800~1200mm, L=90m 등

ㅇ 총사업비 : 650,000천원

Ⅱ		추진경위

ㅇ '22.05. : 대림동783-6 건축주 민원 제기

ㅇ '22.05. ~ 06. : 하수관로 이설 완료(임시 이전)

Ⅲ		사업계획 변경 개요

□ 하수관로 이설 사유

ㅇ 민 원 인 : ***(대림동783-6 외 2필지 건축주)

ㅇ 민원내용 : 해당 지번 신축 건물 공사를 위한 기초 터파기 중 사유지를 통과하는 하수관로가 발견되어 이설 요청

ㅇ 조치내용 : 건축주의 하수관로 이설에 따른 공사기간 지연을 원치 않아, 신축 건물 구조물에 저촉되지 않는 부지(사유지)에 임시 이전을 완료 후 2023년 영구 이설

당초 사유지 임시이전	임시이전 당초 관로

□ 기본 및 실시설계 시행

ㅇ 해당 사유지를 통과하는 하수관로(D1000mm, L=54m)는 대림로 상에 있는 사각형거(2□3.0×2.5m)에 연결되는 관로의 말단 부로써 수리검토 및 주변 하수관로 통수단면 결정 등 검토 없이 통폐합할 경우 해당 사유지 주변 지역 침수 발생 우려가 있음

ㅇ 또한 주변 하수관로 심도가 깊어(최대 1.89m) 하수관로 이설 시 안전사고를 대비하여 가시설이 수반되어야 하므로 기본 및 실시설계용역이 필요함

하수관로 사유지 통과 하수관로 이설 계획	대림동 783-9

Ⅳ		검토결과

ㅇ 해당 공사구간의 현장여건 등을 종합적으로 검토한 결과 사유지 주변 침수 가능성 해소 및 민원발생 최소화를 위해 기본 및 실시설계용역 수행이 타당함

ㅇ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	공 사 비	기본 및 실시설계	비 고
당 초	650,000	-
변 경	613,040	36,960

Ⅴ		향후계획

ㅇ 사업추진 계획 변경 검토결과 회신(물재생계획과→영등포구)

- 안전한 공사 수행을 위해 기본 및 실시설계용역 후 공사 시행

붙임  관련 공문 및 자료 각 1부.  끝.