문서번호	도로보수과-1597
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	서부도로사업소장
정의현	유은중	02/15
		최연우
협 조
	주무관		맹우재

2023년 특별시도 유지관리계획

서부도로사업소

(도로보수과)

2023년 특별시도 유지관리계획

우리사업소에서 유지 관리하는 특별시도(71개 노선)에 대하여 지속가능한 기반시설 관리 기본법에 의거 2023년도 특별시도 유지관리계획을 수립하여 도로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ ｢지속가능한 기반시설 관리 기본법｣ 제9조의 2

- 기반시설 관리실행계획의 수립·시행

□ 관리대상(특별시도) 현황

○ 관리대상 : 특별시도 세종대로 등 71개 노선

구분	노선수	연장(km)	면적(㎢)	비고
중 구	25	39.08	0.855
용 산 구	14	38.02	0.829
서대문구	11	38.99	0.850
마 포 구	14	35.71	0.763
은 평 구	7	33.32	0.805
합 계	71	185.12	4.102

○ 2022년 보수・보강 실적

구 분		유지보수 실적	예 산 (백만원)	보수기간	비 고
년도	공사
2022년	노후포장도로정비	절삭후 아스콘 덧씌우기 3,559a 소파 포장보수 33.91a	10,347	2022.05.02.～ 2022.12.20.
	포장도로 긴급복구	절삭후 아스콘 덧씌우기 75a 소파 포장보수 284.81a 긴급 소파보수 5,020hr	3,391	2022.01.17.～ 2022.12.14.
	굴착복구	절삭후 아스콘 덧씌우기 490a 굴착복구 169.37a 표층 확폭복구 9.84a	4,709	2022.01.01.～ 2022.12.31.
	불량맨홀 정비	불량맨홀 452개소 정비	944	2022.04.06.～ 2022.12.07.
	직영반 보수	포트홀 보수 개소	58,434	2022.01.01.～ 2022.12.31.

□ 2023년 특별시도 유지관리 계획

○ 도로 순찰 계획

- 매월 순찰조를 편성하여 순찰 시행

- 구별 담당자는 120민원, 전화민원 등에 대해 현장 조사 병행하여 순찰 시행

- 직영반 2개조 민원현장 정비를 위해 출동 시 순찰 병행 시행

○ 공사별 도로 포장 유지관리 계획

연번	구 분	정비대상	정비내용	정비기간	예 산 (백만원)
1	노후포장도로정비	- SPI 6이하 특별시도 구간 · 월드컵로 등 25개 노선	- 절삭 후 아스콘 덧씌우기 2,582a 소파 포장보수 20a	‘23.03.～12.31.	*****
2	포장도로 긴급복구	- 포장상태 불량구간 · 공동 등 긴급민원 · 120민원 및 도로순찰 결과 - 타 공사 연계 및 유관기관 요청 구간	- 절삭 후 아스콘 덧씌우기 37a 소파 포장보수 201a 공동작업 44hr 긴급 소파보수 4,850hr	‘23.01.～12.31.	*****
3	굴착복구	- 도로굴착 관리청 복구 구간 - 사후 정비대상 · 북한산로 등 2개 노선	소규모 포장복구 180a 절삭후 아스콘 덧씌우기 180a	‘23.03.～12.31.	***** ****
5	고강성 콘크리트 포장	- 포장파손 취약구간인 중앙버스 정류장 · 버스교통량 : 일일 1,000대 이상 · 자율주행·심야버스 노선 및 민원 우선 고려	중앙버스정류장 9개소	‘23.03.～08.31.	***** ****
4	불량맨홀 정비	- 맨홀뚜껑과 도로포장면이 1cm 이상 차이가 발생하는 맨홀	- 불량맨홀 1,000개소	‘23.03.～12.31.	*****
5	직영반 보수	- 120민원, 전화민원, 현장 순찰 등에 의한 도로 파손이 경미한 구간	긴급 소파보수 (상온아스콘 또는 가열아스콘)	‘23.01.～12.31.	***

※ 120민원, 전화민원, 현장 순찰 등 신속한 복구가 필요한 사항에 대하여 24시간 상시 응급복구반 운영

‣ 평일 : 주간(09:00 ~ 18:00) 직영반 2개조 운영

야간(22:00 ~ 익일 06:00) 민영반 1개조 운영

‣ 주말(공휴일 포함) : 24시간 민영반 2개조 운영(필요시 직영반 운영)

□ 도로 파손 발생시 조치체계

○ 도로 파손 상황 : 공동(함몰 등), 포트홀, 소성변형, 침하 등 도로 파손

※ 도로 파손 집중기간 : 해빙기, 우기, 폭염기 등

○ 도로 파손 예방적 조치 실시

- 우기(07월) 전 도로 포장 불량구간 및 중앙버스전용차로 우선 정비 완료를 통한 선제적 포장 정비

‣ 우기 전(07월) 정비 완료(노후포장도로 정비공사 및 고내구성 포장 70%)

- 상시 현장 순찰을 실시하여 경미한 도로 파손 부(균열 등)에 대하여 소파 포장 보수 실시

○ 도로파손 발견・신고시 처리계획

	신고자 신고/제보																											현장 순찰
															신고											발견
	도로 파손 발견																											도로 파손 발견
															도로보수과 담당자 (02-300-8352 ~ 8357)
				조치 결과 통보											도로 파손 확인(현장점검 등)
									경미한 경우																				중대한 경우
	직영반, 민영반																									포장도로 긴급복구(연간단가) 담당자
	긴급보수 투입하여 당일 조치 (포트홀, 소성변형, 공동 등)																									포장도로 긴급복구공사(연간단가) 작업지시를 통해 도로 재포장 또는 공동 조사 실시 조치결과 확인
																조치 결과 보고
																										포장도로 긴급복구(연간단가) 시공사
																										도로 파손부 재포장 실시 또는 공동조사 실시 조치결과 보고 및 통보

붙임 1. 순찰계획 2부.

2. 도로함몰 대응체계 매뉴얼 1부.

3. 긴급출동(용역) 운영 계획 보고 1부.

4. 유관기관 비상연락망 1부.

5. 사고발생 상황보고서 1부.  끝.