문서번호	설비부-2305
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장 직무대리
이동걸		김현기	02/15
			신용휴
협 조

[서울시네마테크 건립 전기공사]

물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 검토 보고

2023. 2.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

[서울시네마테크 건립 전기공사]

물가변동으로 인한 계약금액 조정(4회) 검토 보고

[서울시네마테크 건립 전기공사] 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건에 대하여 검토 결과를 보고드림

1

관 련 근 거

○ 지방계약법 제22조 및 같은법 시행령(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제100조

(국토교통부 고시 제2020-987호, 2020.12.16. 물가변동으로 인한 계약금액 조정)

○ 물가변동 검토보고: 근정시네 제2023-062호(2023.02.10.)

2

공 사 개 요

○ 공  사  명 : 서울시네마테크 건립 전기공사

○ 위     치 : 중구 초동 64-11(초동공영주차장)

○ 규     모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4806.11㎡

**************************************************

○ 계약금액 :***********************************

○ 공사기간 :***************************************************

○ 시 공 사 :*********

○ 건설사업관리단 : *******************

3

검 토 내 용

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 충족 요건(지방계약법 시행령 제73조)

- 계약을 체결한 날(직전 조정기준일)부터 90일 이상 경과

- 입찰일(직전 조정기준일)을 기준으로 하여 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

○ 물가 변동 조정 조건 충족 여부

구 분	검 토 내 용		기 준
조정방법	*****		계약사항
경과기간	*******	***************** ******************	90일 경과
조정률	*****		증감 3% 이상시
충족여부	**		-

○ 계약금액 조정 세부검토 내용

구 분		검 토 내 용	비 고
계약금액(A)		**************
물가변동 제외금액(B)		************	정산보험료 등 제외
물가변동 조정기준일 현재 공정률	예정공정률	******	예정공정표 기준
	실행공정률	*******	One-PIMS 기준
	제외공정률	**	정산보험료 등 제외
물가변동 적용대가(C)		**************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금지급 없음
물가변동 적용금액(G)		***********	G=E-F (천단위 절사)

○ 계약금액 조정 내용

(단위:원)

구 분	당 초	변경후	증감액
총차	*************	*************	**********
2차	***********	***********	******

○ 물가변동 조정금액 현황(총차 금액 기준)

구 분	기준시점	비교시점	경과기간	조정률	물가변동금액	비고
제1회	**********	**********	****	*****	***********	*
제2회	**********	**********	****	*****	***********	*
제3회	**********	**********	****	*****	***********	*
제4회	**********	**********	****	*****	***********	**
합 계	*	*			************	*

○ 건설사업관리단 검토의견

- 도급사가 제출한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 보고서 검토결과, 경과기간이 기준시점으로부터 90일 이상 지났고 지수조정률이 3%이상으로써 관련 규정에 의거 물가변동 조정 요청이 적정하게 산출된 것으로 판단됨

4

검 토 결 과

○ 건설사업관리단의 검토의견이 적합하다고 판단되므로 계약금액 조정을 승인코자하며, 추후 변경계약 시 반영될 수 있도록 업무지시하고자 함

붙임  실정보고 검토보고 1부.  끝.