문서번호	치수과-2091
결재일자	2023. 2. 17.
공개여부	비공개(5)
방침번호	부구청장 제177호

주무관		하천팀장	치수과장		건설교통국장		부구청장
김경택		오병삼	최강윤		장병조		02/17
							김경탁
협 조
						기획경제국장		권병식
						재무과장		이성수
						계약심사팀장		代오승우
						계약팀장		심은진

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

「안전사고 예방과 시설물 유지관리를 위한」

2023년 하천 내 시설공사(연간단가) 발주 계획

2023. 02. 10.

건설교통국

(치수과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률, 하천법 제27조)	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 ■ 시비 ■ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비 예 산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정 (이행방안: 워크숍, 자문위원회 등)	■ 해당 없음
협업 협치	타 기관 및 단체	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	□ 협업 필요(해당부서: )	■ 해당 없음
추진절차		■ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 □ 기타 위원회 심의 등	□ 해당 없음
홍보방안		□ 보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 □ 타 기관 사례 파악 비교 □ 안전대책 □ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 □ 바른 우리말(행정순화어)

「안전사고 예방과 시설물 유지관리를 위한」

2023년 하천 내 시설공사 발주 계획

구민에게 건강증진과 다양한 여가활동에 기여하고 있는 관내 하천시설물에 대한 신속한 정비로 주민 불편을 최소화 하고자 하천 내 시설공사 발주 계획을 보고함.

1		사업개요

□ 사 업 명 : 2023년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가)

□ 사업위치 : 고덕천, 망원천, 대사골천

□ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2024. 2. 29.

□ 총사업비 : 760,000천원(구비 550,000, 시비 180,000)

□ 사업규모

○ 하천시설물(수경시설, 휀스, 데크 등) 정비

○ 하천준설 250㎥, 조경석 쌓기 160톤, 초화류 식재 3,000주

○ 산책로 및 자전거도로 정비 40a, 저류시설 관리 등

2		세부 사업내용

(단위 : 천원)

통합발주	세부사업	공사위치	공사내용	사업비	비고
계				760,000
2023년 관내 하천시설물 정비	관내 하천시설물 정비	고덕동, 망월천, 대사골천	하천시설물, 산책로 및 자전거도로 정비 등	550,000	구비
	고덕천 저수호안 확폭 및 정비	고덕천 상일2교	상일2교 하부 수로 확폭 및 정비	180,000	시비
	고덕천 안전한 산책로 조성사업	고덕천 고덕교 인근	태양광LED 표지병 설치(관급자재 설치)	30,000	구비

3		현황 및 문제점

□ 시설물 정비 시 공사 공간 부족으로 산책로와 자전거도로 일부를 점유하여야 하는 여건으로 2~3개 업체가 동시 작업 시 하천 이용객 불편과 안전사고 발생 우려가 있어,

□「고덕천 저수호안 복구공사」및「고덕천 안전한 산책로 조성사업」을 하천시설물 유지관리공사(연간단가)에 포함 발주하여 현장관리에 있어 업체간 저촉되지 않고, 하천 이용 주민의 불편을 최소화 하고자 함.

4		발주계획

□ 공 사 명 : 2023년 관내 하천시설물 유지관리공사(연간단가)

□ 공사내용 : 관내 하천시설물 유지관리 및 주민 이용 환경 개선

□ 공사기간 : 착공일 ~ 2024. 2. 29.

○ 겨울철 강설 대비 하천 제설작업을 위해 예산 사고이월 후 준공 예정

□ 발주금액 : 760,000천원(구비 580,000, 시비 180,000)

○ 예산과목

- 치수과/하수시스템구축/하수도정비/하천 유지관리/시설비--550,000천원

- 물순환안전국 치수안전과/치수 및 하천 관리/수방대책 사업/고덕천

(강동구) 저수호안 확폭 및 시설물 정비/시설비(시비)----180,000천원

- 치수과/하수시스템구축/하수도정비/고덕천 안전한 산책로 조성사업/

시설비(주민참여예산사업)------------------------------30,000천원

□ 계약방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

□ 입찰참가 자격

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 구비하고, 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 의한 종합건설업 중 토목공사업(토목건축공사업 허용) 면허를 소지한 업체 또는 전문건설업 중 토공사업, 시설물유지관리업, 조경시설물설치공사업 면허를 모두 등록한 업체로서, 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소재지가 서울특별시에 소재한 업체이어야 함.

5		향후계획

□ 2023. 2. : 일상감사 및 발주

□ 2023. 2. : 공사계약

□ 2023. 3. ~ 2024. 2. : 공사시행

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 공사시방서 1부.  끝.