문서번호	설비부-2497
결재일자	2023. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장 직무대리
정상진	김현기	02/17
		신용휴

「서서울미술관 건립공사 통신공사」

관급자재 계약취소 및 재구매 검토보고

2023. 2.

도시기반시설본부

(설비부)

「서서울미술관 건립공사 통신공사」

관급자재 계약취소 및 재구매 검토보고

우리 본부에서 시행중인「서서울미술관 건립공사 통신공사」와 관련하여 소요되는 관급자재 계약취소 및 재구매 요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고드림

1		관련근거

□ 납품기한 연기 실정검토 보고(광장(서서울)-기검통-82호(2023.2.17.))

□ 물품 다수공급자 계약특수조건 제26조(납품기한의 변경)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서서울미술관 건립공사 통신공사

□ 공사업체 : (주)태양이엠씨

□ 공사금액 : 금712,490천원(관급자재 금609,368천원)

□ 공사기간 : 2022. 11. 30. ~ 2024. 10. 15.

□ 공사위치 : 서울시 금천구 독산동 1151번지

□ 공사규모 : 지하2층/지상1층, 연면적 7,186㎥

3		검토내용

□ 공사기한까지 납품기한 연장이 불가한 물품 계약취소 검토

○  해당 물품 납품기한(2023.2.17.)내 납품이 어려움

계약자 및 납품요구번호	품명	규격	수량	단가	금액	납품기한
(주)엠에스하이테크 (12-22-2-67890-00)	영사용 스크린	MSC-WD200, 4400×2480mm	5	2,400,000원	12,000,000원	2023.2.17.
		MSC-100, 2100×1800mm	2	609,000원	1,218,000원

□ 감리단 검토의견

○ 건축 선행공정 준공기한(2024.10.15.)이 현재 진행중이며, 통신 관급자재 설치시기가 미도래하여 건축 준공기한에 맞춘 납품기한 변경이 적합한것으로 판단됨

□ 보고자 검토의견

○ 건설사업관리기술단이 제출한 관급자재 계약취소에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 계약취소를 의뢰하고 선행공정(건축)일정에 맞추어 추후 해당 계약상대자(동일업체)에 관급자재 재구매 추진

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.